운북 복합레저단지 조성사업 실시설계 용역

과  업  내  용  서

2007. 3

목       차

Ⅰ. 과업의 개요	1

Ⅱ. 일반사항	2

Ⅲ. 기반시설 실시설계	16

Ⅳ. 토질조사	39

Ⅴ. 3D시뮬레이션	51

Ⅵ. 모형제작	53

Ⅶ. 성과품작성	55

Ⅷ. 예정공정표	56

Ⅰ. 과업개요

1. 과업명 : 운북 복합레저단지 조성사업 기반시설 실시설계 용역

2. 위  치 : 인천광역시 중구 운북동 일원

3. 목  적

동북아 경제의 중심국가 실현을 위한 거점지역으로서 외국인투자유치, 지역사회의 발전 및 국제적 수준의 복합레저공간으로 조성될 수 있도록 최상의 기반시설 실시설계를 수립하는데 있음.

4. 과업기간 : 착수일로부터 540일간

5. 과업면적 : 2,729,347㎡ (약 825,600평)

6. 과업내용

가. 기반시설 실시설계

나. 토질조사

다. 3D시뮬레이션

라. 모형제작

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위

본 과업내용서는 운북복합레저단지 조성사업을 위한 실시설계 용역을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업내용서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 건설공사기준, 인천광역시 설계기준, 제 규정 및 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독원과 협의하여 수행해야 한다.

2. 법규 우선준수

수급인은 이 과업내용서에 "○○은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 과업내용서에서 같다.)의 규정에도 불구하고 이 항에서 정하는 바에 따른다."라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 이 과업내용서의 내용이 대한민국 관련법규와 상호 모순될 경우(과업수행중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.)는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

3. 용어 정의

가. 발주자

『발주자』라 함은 해당용역의 시행주체인『인천광역시도시개발공사』로서 수급인에  대한 계약당사자를 말하며,『건설기술관리법 제2조 제5항』의『발주청』을 말한다.

나. 수급인

『수급인』이라 함은『기술용역계약 일반조건 제2조 제2항』의『계약상대자』   를 말한다.

다. 감독원

『감독원』이라 함은 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘․감   독할 수 있는 자로써 인천광역시도시개발공사가 임명․통보한 직원을 말한다.

라. 설계도서

설계도면, 설계내역서, 공사시방서, 구조 및 수리계산서, 발주자가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 말한다.

마. 설계도면

과업계획에 의해 제시된 목적물의 형상과 규격 등을 표현하기 위해 수급인에 의해 작성된 도면으로 물량산출 및 내역산출의 기초가 되고 시공자가 시공상세도를 작성할 수 있도록 모든 지침이 표현된 도면을 말하며, 복잡한 부분을 쉽게 판독할 수 있도록 상세히 작성한 상세설계 도면과 구조계산이 필요한 가시설물의 도면을 포함한다.

바. 공사시방서

공사시방서는 건설표준시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성․지역여건․공사방법 등을 고려하여 기본 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능․규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하여야 한다.

사. 설계기준서

설계기준서는 설계의 기초가 되는 각종 법령, 규정, 지침, 표준, 규격 및 기준 등의 내용을 종합하여 검토한 후 주요공종을 대상으로 당해설계 수행시에 적용하기로 결정한 기준사항들을 명시한 기록을 말한다.

4. 용어해석의 우선순위

가. 이 과업내용서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

1) 계약문서(이 과업내용서를 포함한다.)

2) 건설기술관리법, 동 시행령 및 동 시행규칙

3) 기타 건설관련 법규

4) 공사 종류별 용어사전

5) 국어사전

나. 과업내용서상에 용어해석의 차이가 있을 경우에는 감독원와 수급인이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

5. 용역감독의 권한

가. 용역감독

감독원은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 설계도서 작성현황 및 업무수행상태

3) 기타 확인이 필요한 사항

나. 용역점검

감독원은 설계품질 확보를 위해 수급인에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는한 수급인은 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

6. 수급인의 책임

가. 책임한계

1) 감독원의 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생한 모   든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 용역 준공후에도 이러한 사항에 대해 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 수급인은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손  실보상 등 책임을 져야한다.

3) 수급인이 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으 로 하여야만 그 효력이 발생한다.

나. 지시의 이행

감독원이 용역업무의 수행에 관하여 사업책임기술자에게 지시부를 통하여 지시한 경우 사업책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명 날인한 후 제출하여야 한다.

다. 관계기관 협의

1) 과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가 등을 위하여 필요할 시 수급인은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 하고 협의문서 및 회의록 등 협의자료를 정리하여 용역준공 시에 제출하여야 한다.

2) 과업수행을 위해 요구되는 각종 인․허가 등을 위하여 필요할 시 수급인은 관련자료 작성에 적극적으로 협조하여야 하며 인․허가 자료 작성기관과 긴밀히 협의하여 인․허가 승인 신청 및 승인에 문제가 없도록 하여야 한다.

라. 공정관리

1) 수급인은 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시점검 관리하여 잔여과업기간 부족으로 인한 부실설계 되지 않도록 하여야 한다.

2) 수급인은 실시계획승인을 득한 즉시 발주자의 사업추진 일정을 감안하여 공  종별 세부 잔여설계 과업량 및 소요일수와 공사발주 가능시기 등을 작성하여 감독원에게 보고하여야 한다.

마. 문서의 기록비치

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 감독원의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독원의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

바. 재조사

이 과업을 수행함에 있어 감독원이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 하고 이에 따른 비용은 수급인 부담으로 하여야 한다.

사. 안전관리의 의무

수급인은 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 측량 등 제반작업 수행시 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

아. 법률준수의 의무

수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

자. 관련업무의 숙지

경제자유구역 또는 운북복합레저단지 조성사업과 관련하여 진행중이거나 계획중인 각종 용역, 기준, 지침등을 숙지하고 검토후 반영하여야 한다.

7. 주요 업무의 사전승인 등

수급인은 다음 사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

가. 설계계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 설계기준서 작성 또는 변경

다. 주요 설계내용의 변경

라. 자문 및 관계기관과의 협의사항

마. 추가로 토질시험을 요하는 사항

바. 「Ⅲ. 기반시설 실시설계」에 명시한 세부과업 착수 및 종료시

사. 기타 감독원이 요구하는 사항

8. 용역수행자의 교체

이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임기술자 또는 용역에 참여하고 있는 건설기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 수급인에게 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

9. 적격심사 관련사항 준수

수급인은『기술용역계약 일반조건 제38조 제1항』에 따라 수급인이 제출한 적격심사 관련사항에 대하여 준수하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 인하여 변경코자 할 경우에는 감독원과 사전협의 후 내용변경 승인을 받아야 한다.

10. 제출물

가. 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.

나. 감독원은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

다. 수급인은 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 한다.

라. 수급인은 과업수행과 관련하여 발주자, 지자체 또는 다른 관계기관과 협의한 사항에 대하여는 회의록 및 관련자료를 작성 제출하여야 한다.

마. 수급인이 제출한 제출서류가 계약에 위배되는 경우 수급인은 감독원이 검토 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

11. 착수신고서 및 기타제출

수급인은 과업을 착수한 즉시 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.

가. 착수계

나. 세부시행계획서

다. 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

라. 보안대책 및 보안각서

마. 예정공정표

바. 기타 발주자가 요구하는 사항

12. 과업수행 보고

가. 착수보고

1) 수급인은 현장여건 등을 검토한 후 용역착수후 15일이내에 착수보고를 해야하며, 착수보고는 사업책임기술자가 직접 보고하되 설계계획서 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

2) 예정공정표는 네트워트 개념으로 작성하여 각 공종간의 공정현황을 상호 유기적으로 확인 할 수 있도록 한다.

나. 진도보고

수급인은 과업수행기간중 다음사항을 포함한 진도보고를 매월 2째주 및 4째주를 기준으로 다음주 화요일(화요일이 공휴일일 경우 그 다음날)까지 분야별 용역감독원을 경유하여 서면으로 보고하여야 한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 각종 문서수발현황

3) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

4) 참여기술자 현황

5) 다음 2주간 과업수행계획

다. 중간보고(수시보고)

다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

3) 건설교통부 및 인천광역시, 해당 행정기관에서 주요현안사항에 대한 보고 등  요구사항이 있을 경우

4) 감독원이 용역수행상 필요하여 요구할 시

라. 용역준공 전 종합보고

수급인은 용역준공 30일전까지 용역수행결과를 종합하여 용역준공 전 종합보고를 해야 하며, 사업책임기술자가 직접 보고하여야 한다.

13. 협의와 조정

가. 본 과업은 분야별 책임기술자들이 수시로 회의를 개최하여 상호간의 의견을 조정하여야 하고 특히 토질조사 결과 등이 과업에 서로 유기적으로 반영되어 추진될 수 있도록 하여야 한다.

나. 수급인은 의견조정시 중요사항은 감독원과 협의하여 결정하여야 하고, 회의록을 작성하고 참석자들의 날인을 받은 후 감독원에게 제출하여야 한다.

14. 설계자문

가. 감독원은 과업수행중 중요한 사항의 결정을 위해 당해 전문가에게 자문을 받도록 수급인에게 요구할 수 있으며 수급인은 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 감독원이 요구하는 시기에 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

나. 수급인은 설계자문결과 제시된 의견에 대해서는 감독원과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

15. 기술심의

가. 수급인은 기술심의를 위해 감독원이 요구하는 시기에 심의요청 자료를 작성  하여 감독원에게 제출하여야 한다.

나. 기술심의결과 지적사항에 대해서는 요구하는 기간내에 조치결과를 작성․제출해야 하며, 설계보완이 필요할 시 감독원과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

16. 건설폐기물 활용계획

가. 사업지구내에서 발생되는 건설폐자재에 대하여는 자원의절약재활용촉진관련법률에 따라 재활용 하는 것을 원칙으로 하고, 구체적인 활용계획을 제시하여야 한다.

나. 재활용이 곤란한 건설폐자재에 대하여는 관련 법규에 적합하도록 별도의 처리계획을 수립해야 한다.

17. 감독원 상주에 따른 업무협조

가. 과업과 관련하여 감독원은 수급인의 사무실에 상주하여 근무할 수 있다.

나. 수급인은 상주하는 감독원이 업무수행에 지장이 없도록 협조하여야 하며, 감독원이 품위를 유지할 수 있도록 협조하여야 한다.

다. 감독원의 과업수행과 관련한 상주로 발생되는 비용은 수급인 부담으로 한다.

18. 용역중지

수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 비효율적이거나 지난하다고 판단될 경우 감독원은 용역중지를 명할 수 있다.

19. 용역의 부분준공

본 사업추진과 관련하여 운북 복합레저단지 조성사업 추진계획 변경 등에 따라 용역과업의 계속 수행이 불가능하거나 불필요할 경우에는 발주자의 필요에 따라 부분준공 처리하며, 부분 준공시의 정산기준은 국가계약법에 따른다.

20. 기타사항

가. 과업내용서에 명기되지 않은 경미한 사항 및 부대업무와 관련법규 등 개정으로 인한 소요업무에 대하여는 수급인 부담으로 처리하여야 한다.

나. 용역준공 후라도 추후 계획 및 설계상 미비사항이 발견될 경우 수급인은 이를 보완하여야 한다.

다. 설계시 사용된 구조, 토질, 상하수도 등 전산프로그램에 대하여는 발주자 직원이 사용가능하도록  실무수습을 실시하여야 한다.

21. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

나. 수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 용역착수계와 함께 수급인 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

다. 용역참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독원의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

라. 수급인은 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

마. 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

바. 용역의 정․부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록 유지하여야 한다.

사. 과업성과품 발간시 유의사항

수급인은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

아. 보안관리의 책임

수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

자. 수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 발주자의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안된다. 본 항에 위배하여 문제가 발생하였을 경우에는 손해에 대한 책임을 져야한다.

차. 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄처리하여야 한다.

22. 설계변경

발주자는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

가. 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나. 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시

다. 사업 추진계획 변경에 따른 사업규모 등이 변경될 경우

라. 본 실시설계용역과 관련하여 아래와 같은 특수시설물에 대한 실시설계 등의 과업범위에 추가될 때

1) 하수종말처리장, 폐수처리장

2) 폐기물처리시설(소각장, 매립장 등)

3) 정수장, 취수장, 배수지, 가압펌프장 등 수처리시설물

4) 터널, 지하차도

5) 교량(고가차도 등)

6) 기타 위에 준하는 특수시설물

마. 실시설계에 대해 설계변경을 할 경우 용역대가 산정은 엔지니어링 기술진흥법에 의한 「엔지니어링 사업대가의 기준」에 따르며, 적용기술용역대가 적용요율은 당초 용역발주시 계약한 낙찰율을 적용하며 감독원과 사전협의하여 결정한다.

바. 위 각호의 사유로 과업 변경요인이 발생할 시 또는 계약체결후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당금액을 조정한다.

사. 본 용역은 계획변경으로 인해 과업을 더 이상 진행할 수 없을 경우 타절 준공 할 수 있다.

23. 성과품 작성시 유의사항

가. 성과품 작성시 고려되어야 할 사항

1) 설계변경 및 공사비 증액의 최소화

2) 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준 제시

3) 건설폐자재 활용방안 검토

4) 건설 신기술의 공법 및 적용기준 제시

5) 공사시행시 발생될 수 있는 설계변경 예상목록의 작성

나. 성과품 작성시 서술원칙

1) 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피한다.

2) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

3) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

4) 정확한 문법으로 기재할 것

5) 예측보다는 직설적으로 기술할 것

6) 모순된 항목은 배제할 것

7) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

8) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

9) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

10) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

다. 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

1) 한글 맞춤법 (교육부)

2) 외래어 맞춤법 (교육부)

3) 기본 외래어 용어집

라. 성과품 작성에 사용하는 문장구성

1) 성과품 내용에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가   빠진 문구의 사용은 지양한다.

2) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

3) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

4) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

마. 성과품 작성에 사용하는 용어

1) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

2) KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

3) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

4) 정부제정 제 기준 용어

5) 기타 국어사전에서 정의, 사용한 언어

바. 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

1) 애매한 표현 배제

「원칙적으로」,「대체로」,「충분한」,「관련○○」등의 애매한 표현을 최     대한 배제

2) 주어의 명확화

① 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여「누가」,「무엇을」,「어떻게」  해야 하는지를 명확하게 기술

②「수급인은」,「감독원은」등 주어 명시

3) 약어사용

① 가능한 약어를 사용하지 말 것

② 약어사용이 불가피한 경우 다음에 따른다.

- 사전에 수록되어 있는 약어

- KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

- 약어는 원단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

사. CD-ROM 작성방법

1) CD-ROM 구분표기

각 공사별로 CD-ROM을 구분하기 위해 CD-ROM 케이스에 다음 표-1과  같은 레이블을 표시하여야 한다.

표 - 1

용 역 명
공 사 명
설계사명		담당자 및 전화번호
CAD 명		사용버젼
용역감독원
용역계약일		용역기간

2) 성과품 정보

수급인은 CD-ROM 작성시 다음 표-2와 같은 성과품정보 화일(FILE)을 포함하여 저장해야한다.

표 - 2 성과품 정보

용 역 명
공 사 명
설계사명		대표자명
설 계 자		설계확인자
용역기간		납품일자
전화번호		발주부서

3) 설계참여자 명단

수급인은 CD-ROM 작성시 설계도서 작성의 책임소재를 분명히하기 위하   여 다음 표-3과 같은 설계참여자 명단(FILE)을 포함하여 저장해야 한다.

표 - 3 설계참여자 명단

분야명	성명	주민등록번호	기술자등급	사업참여기간	소속업체

4) CD-ROM화일 작성방법

CAD로 작성된 도면화일은 공종별 폴더로 분류하고 식별이 용이할 수 있    도록 화일명을 부여하여 *.DWG 포맷으로 CD-ROM에 저장해야 하며,     각종 성과품을 CD-ROM 화일로 작성할 때의 기준은 아래와 같다.

D:\	DRAWING \CAD \공종별폴더 CAD로 작성된 도면, 도면목록 화일을 저장
	\FONT CAD 도면 작성시 사용된 한글 FONT 화일을 저장
	SPEC 공사시방서 화일을 저장
	DESIGN 설계서, 설계예산내역서, 일위대가표, 단가산출서, 수량 산출서, 구조 및 수리계산서, 토적표 등
	ETC 기타 설계도서

아. 설계도서의 납품

1) 수급인은 각 분야의 설계성과품 작성기준에 따라 작성 제출하여야 한다.

2) 수급인은 발주자의 사정으로 인하여 공사의 일부를 우선하여 발주하거나 단  계별로 공사발주를 하고자 하는 경우 지정하는 기일까지 필요한 공사발주용  성과품을 납품하여야 한다.

3) 수급인은 감독원이 요청한 성과품 납품예정일 또는 용역준공일 7일 이전에  성과품에 대한 사전검사를 받아야 하며, 지적사항을 보완하여 최종성과품을  납품하여야 한다.

4) 수급인은 공구분할하여 발주하게 되는 경우 상호 인접공구와 연계하여 설계  하여야 하며, 설계성과품을 공구별로 분리하여 제출하여야 한다.

자. 기  타

1) 각종 보고서 작성시 본 과업수행을 위해 참여하였던 기술진 및 공사관련 직원의 명단을 수록하고 제출문에는 현장대리인 및 부문별 책임기술자가 날인하여야 하며 참여기술진의 부문별 참여사항(내용, 기간 등)을 수록하여야 한다.

2) 부실공사 예방을 위한 대책(안)을 고려하여 계획에 반영하여야 한다.

24. 특기사항

가. 본 단지는 과업수행 초기단계부터 제반사항 및 처리대책을 관계기관과 면밀히 협의를 거쳐 계획수립에 만전을 기하여야 한다.

나. 본 단지내 저지대에 대하여는 수해발생에 대비한 방재계획을 별도 계획하여 대책을 강구 설계에 반영하여야 한다.

다. 토취장의 선정은 가장 경제적이고 효과적인 사업시행이 될 수 있도록 적합한 위치를 선정하는 등 토취장 확보대책을 면밀히 검토하여 계획수립에 만전을 기하여야 한다.

라. 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 과업 수행상 필요하다고 인정되는 중요사항 및 기타 경미한 추가과업, 부대업무, 관련법규 등 위 개정으로 인한 소요업무에 대해서는 발주자의 요청이 있을시 이에 응해야 한다.

마. 본 과업내용서의 해석상 의견이 서로 상이할 경우 협의하여 결정하고 협의가 성립되지 않을 경우 발주자의 의견에 따른다.

Ⅲ. 기반시설 실시설계

1. 과업의 목적

본 과업은 운북 복합레저단지 개발사업의 실시설계를 수행하는데 있어 합리적이고 효율적인 과업추진에 그 목적이 있다.

2. 과업의 범위

본 과업은 인천시 운북동 일원에 위치한 운북 복합레저단지 개발사업의 2,729천㎡에 대한 실시설계 과업에 시행한다

3. 주요과업내용

가. 단지정지 및 토공 설계

나. 연약지반처리 설계

다. 도로 설계

라. 배수 설계

마. 상수도 설계

바. 호안 설계

사. 구조물 설계

아. 교량 설계

자. 전기 설계

차. 조경 설계

카. 폐기물 처리 설계

타. 설계도서 작성

4. 일반지침

가. 실시설계는 현황측량, 토질조사, 각종 영향평가, 기본계획 및 기본설계 등의 결과를 감안하여 추진하되 사전에 전단계 용역 성과를 충분히 검토·분석 하여야하며, 만일 조정이 필요한 경우 감독원의 승인을 받고 보완하여야한다.

나. 수급인은 각종 공법 및 자재를 선정하기에 앞서 우선적으로 공인된 기관에서 지정한 가용신기술(공법, 자재)을 확인해야 하며, 여타의 공법 및 자재와 장·단점 등을 비교 검토하여야 한다.

다. 수급인은 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검, 관리하여 잔여 과업기간 부족으로 인한 부실설계가 되지 않도록 하여야 한다.

라. 수급인은 개발 및 실시계획 승인, 각종 영향평가 협의 등 인·허가 조건에 대한 사항을 세부 실시설계에 반영하여야 한다.

마. 설계기준서 작성

1) 수급인은 실시설계 착수 후 즉시 설계기준서를 작성하여 감독원의 승인을 받아야 하며, 변경 시에도 같다.

2) 수급인은 설계기준서 작성에 앞서 각종 기준 및 지침의 제·개정 현황을  확인하여야 한다.

3) 설계기준서에는 설계에 반영될 주요자재 및 공법에 대한 사항을 포함하여야 한다.

4) 동일한 수급인이 실시설계를 수행하고 기본설계 단계에서 설계기준서를 작성하여 제출하였다면 추가로 작성할 필요는 없다.

바. 수급인은 도시내 지하매설물 설치에 관한 규정에 의거 지하매설물 설치계획 수립 대상지역에 해당될 경우에는 관계기관과 협의할 수 있도록 지하매설물 설치계획서를 작성 제출하여야 한다.

사. 각 공종별 사용공법에 대하여는 감독원과 협의를 거쳐 결정하여야 한다.

아. 단위 공사별 사용될 장비조합은 조합장비·장비규격별 효율성 및 경제성을 감안하여 선정하여야 한다.

자. 감독원이 분리하여 공사발주 또는 단계별로 공사를 시행하기 위해 공사발주에 필요한 성과품을 공구별로 납품요구 하거나 용역 준공전 일부의 성과품을 우선 납품요구시 공사발주에 지장이 없도록 이에 따라야 한다.

차. 작성된 설계도서가 현지와 일치하는지 여부를 확인하여야 하며, 보완 또는 재검토가 필요한 부분은 완벽히 조치하여야 한다.

카. 실시설계시 사용하는 설계좌표는 지적좌표와 일치하게 하여 사용하여야 한다.

5. 세부지침

가. 단지정지 및 토공설계

1) 단지계획고 결정시 지구에 연한 인접하천의 홍수위와 인접지역 도로 등과의 연계성, 배수계획 등을 충분히 검토하여 합리적이고 경제적인 설계를 하여야 한다.

2) 단지내 제척건물이 있을때에는 배수 및 각종 기반시설을 감안한 단지계획고 수립에 유의하여야 한다.

3) 토량계산

① 토량계산 방법은 양단면평균법을 원칙으로 한다.

② 양단면평균법으로 토량계산시는 단지횡단면을 20m 간격으로 작성하고 지반의 기복 및 사면, 구조물 설치에 있어 필요한 경우 중간점의 단면을 두어야 한다.

4) 단지의 토공설계는 단지를 구성하는 각 요소들의 기능이 충분히 발휘될 수 있게 하고 자연지형의 효율적 활용 및 양호한 생활환경을 조성하는데 역점을 두어야 하며, 현 지형에서 토량이동이 최소가 되도록 한다.

5) 친환경적인 설계를 위하여 자연상태의 훼손을 최소화하고, 보존이 필요한 부분에 대하여는 감독원과 협의 후 보존대책을 수립한다.

6) 종·횡단면도에는 토사, 리핑암, 연암, 보통암, 경암으로 구분하여 암추정선을 표기하고 암질별로 구분하여 수량을 산출해야 한다.

7) 토질정수는 원칙적으로 토질시험결과에 근거하여 설계에 적용해야 한다.

8) 흙이나 암석을 굴착, 다짐할 때의 토량 변화율은 원칙적으로 시험에 의해 산정한 값을 설계에 반영하여야 한다.

9) 노체의 성토재료 최대치수, 입도범위, 수침CBR치(2.5이상), 다짐도 및 노상의 성토재료 최대치수, 입도범위, 밀도, 다짐도 등을 제시하여야 한다.

10) 단지조성으로 인해 발생되는 사면은 구조적 안정성과 미적인 면을 동시에 감안 하여야 하며, 시공성, 안전성 및 경제성을 고려한 법면보호공법을 비교 검토한 후 설계하여야 한다.

11) 사면처리방법은 옹벽 등 구조물을 설치할 경우와 구조물 설치없이 사면 처리를 할 경우에 대해 증가되는 가처분 토지의 공급가격과 구조물 설치 공사비를 비교·검토하여 결정한다.

12) 토취장이나 사토장의 사용여부 및 선정은 감독원과 협의한 후 결정하여야 한다.

13) 절토부 노상의 지지력이 부족하다고 판단될 경우 양질토의 환토 등 지지력 보강공법 및 대책을 마련하여야 하며, 성토부의 시공재료가 불량할 경우에도 노상안정처리공법 등의 대책을 강구하여야 한다.

14) 지구내에서 발생되는 암을 유용하기 위하여 크랏샤를 설치할 경우에는 설치위치를 명기하고, 골재생산시 발생되는 소음과 분진 등을 방지하기 위한 환경저감 시설을 설치하여야 한다.

15) 공원 및 녹지 등 식재지구 지반조성

수급인은 공원 및 녹지 등 조경식재 예정구역에 대하여는 조경수목의 식생에 지장이 없도록 최소한의 토심 및 양질의 토사가 확보 되도록 설계하여야 한다.

16) 암 및 진흙 등 불투수지반내 가로수 식재지반 조성

수급인은 암 및 진흙 등 불투수지반내에 가로수를 식재할 경우 양질토로 환토하고 배수가 가능토록 조치하여 가로수 식생에 지장이 없도록 설계하여야 한다.

17) 학교시설부지 조성

① 학교시설부지는 가능한 평탄하게 조성하여야 한다.

② 토공 및 정지계획이 확정되면 해당교육청과 세부적인 학교 시설부지 조성계획을 재협의하여야 한다.

나. 연약지반처리설계

1) 사업후보지지정, 기본계획, 기본설계 단계에서 토질조사를 시행하여 얻은 자료가 연약지반처리 설계에 부족함이 없고 적절한지 여부를 검토하고 필요시 감독원의 승인을 받아 보충조사를 시행하여야 한다.

2) 연약지반 처리공법은 아래 사항 등을 비교 검토한후 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

① 토질의 물리적·역학적 특성을 충분히 분석하여 토질특성에 부합되는 공법을 선택

② 공사기간, 시공성 및 경제성을 비교 검토하여 공법선정

③ 시공실적이 풍부하여 효과가 입증된 공법선정

④ 연약지반이 깊은 곳에 대해서는 시공가능 깊이 및 Well Resistance  효과를 최소화할 수 있는 공법을 선택

⑤ 시공성, 경제성, 효과 등을 고려하여 필요시 여러가지 공법을 조합하여 선택

⑥ 토지이용시기, 토지의 용도, 상부구조물의 규모 및 형태등을 감안하여 공법선택

3) 토질조사 및 분석을 통하여 얻은 제반 토질정수는 각 토질정수간 상관관계를 검토하고 경험식 및 인접지역의 토질조사 결과치와 비교·검토하여 적정여부를 간접적으로 확인하여야 한다.

4) 전산프로그램을 사용하여 예상침하량을 산정할 경우 전산프로그램의 합리성을 확인 하여야 하며 아래와 같은 설계조건 결정시 충분한 검토를 거쳐야 한다.

① 토지의 용도 및 건축 구조물의 규모를 감안한 합리적인 설계하중 결정

② 설계하중 재하시의 지하수위 위치 및 하중의 형태에 따른 지중응력 증가량 추정

③ 전체 연약층 두께에서 동일 특성을 갖는  연약토층 두께결정

④ 연약층의 과압밀 여부 및 과압밀 정도 결정

⑤ 지하수위의 위치 결정

⑥ 압밀층 배수조건(일면배수, 양면배수, Sand Seam 존재여부) 결정

⑦ 압밀계수등 제반 토질정수 결정

5) 허용잔류침하량 결정은 향후 설계하중으로 재하되는 건축 구조물 및 시설물등의 종류, 규모, 중요도 등을 감안하여 결정하되 구체적인 결정사유를 제시하여야 한다.

6) 간극수 배출을 위한 집수정 및 배수관의 설계는 지하수위가 배수층재 이하에 위치하도록 설계하여야 하며, 집수정은 압밀침하시 기능저하가 최소인 곳에 설치하여야 한다.

7) 수평배수층재의 두께는 주행성 및 배수층재로서의 충분한 역할을 수행하도록 설계하여야 한다.

8) 수직 배수재 타입장비는 현장특성에 맞도록 적정하게 결정하여야 하며, 수직배수재 타입시 지반교란이 최소화되도록 결정하여야 한다.

다. 도로설계

1) 도로포장은 아스팔트콘크리트 포장을 원칙으로 한다. 다만, 감독원이 요구하는 경우 시멘트콘크리트 포장과 비교 검토하여 결정한다.

2) 단지내 도로설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사자료를 기초로 포장구조 및 두께를 결정한다.

3) 간선도로에서 교통혼잡이 예상되는 부분은 도류화 계획 등 구체적인 동선계획을 수립한다

4) 단지내 도로 종단의 기하학적 제원은 「도로의구조시설기준에관한규칙」 등 제기준에 의거 설계함을 원칙으로 하며 부득이한 경우 감독원과 협의후 결정 하여야 한다.

5) 도로폭원별 가각 전제는 건설교통부 제정 도시계획시설기준에관한규칙 및 건축법이 정하는 바에 따라야 한다.

6) 도로의 횡단면 구성은 그 도로의 기능, 주변 토지이용계획을 감안하여 감독원과 협의 후 결정한다.

7) 선형설계의 측점은 20m 간격을 원칙으로 작성하고, 필요에 따라 감독원과 협의 조정하며, 도로 폭원별 표준 횡단면도를 작성하여야 한다.

8) 도로와 단지가 접하는 부분은 가급적 단차를 두지 않아야 하며 부득이한 경우에는 차량의 단지내 진입이 가능한 단차를 두어야 한다.

9) 도로교차 부위는 제기준에 의하여 각 교차부위별로 작성토록 하여야 한다.

10) 아스팔트 콘크리트 포장단면 설계

① 포장설계는  AASHTO설계법과 TA설계법을 비교 검토한 후 감독원과 협의하여 결정한다.

② 도로 및 포장단면 구조는 2개안 이상을 비교 검토한 후 부대시설물의 규격, 종류 등과 함께 감독원과 협의후 결정하여야 한다.

③ 포장층은 동결심도 이상의 충분한 동상방지층을 두어 포장구조의 동결을 방지 하여야 하며 동결심도는 완전방지법, 노상동결관입허용법, 감소노상강도법 등 여러가지 방법을 비교하여 합리적이고 경제적인 방법을 선정한다.

④ 대형 통과차량이 많은 곳은 소성변형을 억제할 수 있도록 표층용 아스콘의 최대 골재크기 및 입도를 결정하여야 한다.

⑤ 아스팔트 콘크리트 재료는 당해 포장단면이 위치하는 지역 등 주변여건을 고려하여 재료의 규격을 정확히 제시하고 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

11) 도로에 설치, 표시되는 부대시설은 도로교통법과 건교부 발행 「도로안전시설 설치 편람」의 제규정에 적합하면서 이용차량과 보행자의 편의와 안전을 도모토록 설계 한다.

12) 도로구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 하자가 발생할 우려가 있는 부분은 감독원과 협의하여 연약지반 처리공법을 검토 적용하여야 한다.

13) 지구내에 개설되는 도로가 지구외 도로와 연결·접합되는 경우 선형 및 계획고 불일치를 방지할 수 있도록 지구외 도로의 일정구간에 대한 종·횡단면 및 좌표 현황을 설계도면에 명시하여야 한다.

라. 배수설계

1) 하수도설계는 환경부제정 하수도 시설기준 및 지자체 하수도정비 기본계획등을 검토하여 감독원과 협의후 결정하여야 한다.

2) 하수배제방식은 분류식을 원칙으로 하되 지자체 협의결과 등을 검토하여 감독원과 협의 후 결정하여야 하며 발생하수량은 전산으로 산정하고 설계입력 및 출력자료를 동시에 제출하여야 한다.

3) 하수도 토구는 인접지역의 유수소통 등을 감안 지자체와 협의하여야 하며 하수배출로 인한 피해 극소화 및 민원이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

4) 하수도구배는 토사 및 부유물의 침전이 없고 세굴이 일어나지 않도록 하며 역수영향 등을 세밀히 검토한 후 결정하여야 한다.

5) 배수체계상 연관이 있을 경우 지구내 제척지 및 지구계 인접지의 발생하수량(우수· 오수량)도 포함하여 설계하여야 한다.

6) 수리계산시 유역면적은 축척 1/25,000 ∼ 1/50,000 지형도상에서 산출하도록 하며, 자세한 검토가 요구되는 부분은 축척 1/5,000 이상의 정밀한 지형도를 사용하여야 한다.

7) 우수배제 유역도를 1/5,000이상 도면에 표기하여 관망 계획도와 함께 수리계산서에 첨부, 제출하여야 한다.

8) 우·오·상수관이 교차하는 곳은 반드시 관의 크로스 체크(CROSS-CHECK)를 실시하여 시공가능 여부를 확인하여야 한다.

9) 우수암거 설계시에는 단면변화부, 수위조절공, 유속저감장치에 대한 상세도를 제시하여야 한다.

10) 하수관종 및 관기초형식은 반드시 구조계산을 거쳐 결정하여야한다. 이때 관체에 작용하는 하중은 토피하중 및 활하중을 적용하여야 한다.

11) 수급인은 우수, 오수, 상수관등 지하에 매설되는 관로와 단독택지 및 소규모 필지의 상·오수지관 현황을 한장의 도면에 표시하는 「관로 종합망도」를 1:500 축척으로 작성하여(Al Size) 제출하여야 한다.

12) 보행자 전용도로는 종단구배 및 인접부지에서의 우수유입여부 등을 감안 적정규모의 횡단배수구 및 집수정을  설계하여야 한다.

마.  상수도 설계

1) 환경부제정 상수도시설기준 및 지방자치단체의 상수도 조례 등을 검토하여 감독원과 협의후 결정하여야 한다.

2) 관망은 일부 관로의 사고 발생시 타 관로를 최대한 이용할 수 있도록 고려하여야 하며, 급수구역내 소요 수압분포가 적절하게 되도록 하여야 하고 전산 PROGRAM종류, 입력 및 출력자료를 첨부하여야 한다.

3) 관매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물 등을 고려한 후 결정하여야 한다.

4) 각종 변실은 도로유지 관리 등을 고려하여 감독원과 협의한 후 선정하여야 한다.

5) 연약지반이나 암구간에는 관로 및 구조물의 안정성을 검토한 후 설계하여야 한다.

6) 관보호공, 이형관보호공, 기타 구조물설치 필요성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 관종 및 접합방법과 변실뚜껑은 경제성과 유지관리 등을 감안하여 감독원과 협의한 후 결정하여야 한다.

8) 급수공급체계를 감안 지구내 제척지 및 지구계 인접지의 급수량도 포함하여 설계토록 한다.

바. 호안 설계

1) 과거 20년간의 기상자료를 수집, 이를 다음 사항별로 정리, 분석하여 이 과업의 수행에 이용 하여야 한다.

① 풍향별(16방위)로 풍급별 발생빈도를 연간, 월간, 계절별로 분석, 정리하고 주풍향, 설계풍향의 풍속 등을 조사 하여야 한다.

② 과거 발생했던 태풍에 대하여 발생지역, 평균 최대풍속, 지속시간 및 당시의 기압등을 조사 하여야 한다.

③ 연간, 월별 강우량 및 시간강우 강도를 분석 정리 하여야 한다.

④ 연간, 월별 최고, 계절별 안개발생일수 및 농도 등을 조사하여야 한다.

⑤ 연간, 월별최고, 최저 및 평균기온을 정리 하여아 한다.

2) 해상자료

① 계획대상항만에서의 조위, 조류, 파랑 등을 조사, 분석하여야 하며 필요시 또는 필요하다고 감독원의 지시가 있을 경우에는 직접관측을 실시한다.

② 조사된 바람자료 및 기존의 관련 용역의 파랑자료를 이용하여 설계파고 및 파향을 추정하여야 하며, 또한 필요지점들의 파고, 파향, 주기 발생빈도 등을 결정하고, 굴절 및 회절에 의한 파의 변화를 검토하여야 한다.

③ 기존의 인근 검조서에서 관측된 조사자료를 분석 정리하여야 하며 필요시에는 조석관측을 시행하여 이를 분석 정리 하여야 한다.

④ 대상지역 및 인근의 기존 자료를 수집, 분석하여 대상 수역의 대표적인 조류방향 및 유속을 정리하여 구조물 설계에 적용한다.

3) 수심측량과 지층탐사는 필요하다고 감독원이 지시하였을 경우에는 실제에 따라 정산을 하여야 한다.

4) 항만 구조물에 대한 설계는 강도 설계법을 사용함을 원칙으로 한다, 다만, 구조물 또는 재료의 특성상 강도설계법을 사용할 이유가 없다고 판단될 경우에는 감독원과 협의하여 허용응력설계법을 사용할수 있다.

5) 호안시설은 기초지반의 지질을 조사하여 침하, 융기현상, 조위, 배수방식 등은 항만 및 어항 설계기준(해양수산부 2000년)에 의하여 위치별로 마루높이, 안전한 구조 및 단면 등의 설계를 하여야 한다.

6) 구조계산 등에 컴퓨터 소프트웨어를 사용하였을 때에는 사용 소프트웨어에 대한 설명과 함께 입력 데이터, 출력내용, 제한조건등을 상세히 수록하여야 한다.

7) 기초구조물 설계 시에는 활동(원호활동 포함), 전도, 지지력 등을 검토하여야 하며 구조계산서에서는 검토과정을 알 수 있도록 상세히 수록하여야 한다.

8) 수급인은 과업진행 중 발주처와 긴밀한 협의 하에 다음 사항을 같은 용역의 모든 중요사항에 대하여 세부사항을 결정하기 전에 발주처와 협의를 거처야 한다.

① 구조물의 형식 및 크기

② 구조물의 표준단면 (공사비 비교를 위한 대체 단면포함)

③ 건설자재

④ 적용할 시공공법

사. 구조물 설계

1) 구조물설계를 착수하기 전 각종 기준 및 지침의 제·개정 현황을 확인하고  설계에 적용을 검토한다.

2) 구조물의 설치위치는 가급적 장래 개발과 연결이 가능하도록 최적지에 설치하여야 하며 가능한 한 주변지형과 조화를 이루도록 하여야 한다.

3) 각종 구조물은 구조적으로 안정성 여부를 검토한 후 설계하여야 한다.

4) 콘크리트 구조물의 설계는 원칙적으로 강도설계법에 따르되 특별한 사유가 있는 경우 감독원과 협의하여 별도의 설계법을 적용할 수 있다.

5) 콘크리트 구조물인 경우 균열에 대하여 다음과 같은 사항을 검토하여 공사시방서 에 명시하여야 한다.

① 각 구조물별, 부위별로 허용되는 균열의 종류 및 크기

② 허용 균열외의 유해균열 발생시 이에 대한 보수, 보강공법 또는 재시공 여부

6) 콘크리트 구조물별, 부위별로 습윤, 증기, 살수, 부직포 양생 등 양생방법 및 양생기간에 대한 사항을 명시하여야 한다.

7) 콘크리트 구조물 설계는 구조물별, 부위별로 콘크리트 타설순서 , 타설방법, 콘크리트 종류(압축강도, 슬럼프치, 골재크기), 타설전·중·후의 유의사항 등을 명시하여야 한다.

8) 수급인은 주요구조물 또는 연약지반위에 설치되는 구조물로서 시공시에 계측이 필요하다고 판단되는 경우 감독원과 협의하여 계측항목과 계측시스템을 설계하여야 한다.

9) 방수재 선택은 확실성, 내구성 및 경제성 등을 감안 비교 검토후 감독원과 협의를 거쳐 결정하여야 한다.

10) 각종 구조물의 내장재 및 외벽재는 경제성, 내구성, 조형미 등을 감안 검토한 후 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

아. 교량설계

1) 구조설계

① 조사, 계획 및 기본설계 결과로 선정된 최적안의 구조형식에 따라 교량의 상부구조, 하부구조, 기초구조의 단면을 설정하고, 구조물의 안정성과 사용성, 내구성 등을 검토하여 상세히 설계한다.

② 콘크리트 교량의 설계법은 극한강도설계법을 원칙으로 하되 특별한 사유가 있는 경우 감독원과 협의하여 별도의 설계법을 적용할 수 있다.

③ 주요 구조물들에 대한 단면을 가정하고 관련설계기준등에 규정된 해석방법으로 모델링하여 구조계산에 필요한 단면계수를 산출한다.

④ 주요하중 및 부가하중을 선정하여 조합하고 최대 단면력(또는 최소 단면력)이 산출되도록 하중재하 위치를 정한다.

⑤ 지진력 계산은 구조물의 형식·형태 등을 고려하여 계산방법을 정한다.

⑥ 설계방법에 따른 하중계수, 강도 감소계수 등을 적용한다.

⑦ 시공방법 및 시공순서를 고려하여 구조계산을 수행하여야 한다.

⑧ 산출된 최대 단면력(휨모멘트, 축력, 전단력, 비틀림 모멘트)에 대한 안정성을 관련 설계기준 등에 근거하여 검토, 확인한다.

⑨ 상부구조의 처짐, 하부구조의 전도 및 활동, 기초구조의 지지력, 변위 등을 검토한다.

⑩ 구조물의 국부에 작용하는 하중 및 단면력을 산정하고 안정성 등을 확인한다.

⑪ 내진설계를 고려하여 상·하부구조 연결부(내진받침, 면진받침, 강결구조 등)를 검토한다.

⑫ 교량받침은 하중의 크기, 상부구조 형식, 지간구성 등을 고려하여 적정한 것을 선정한다.

⑬ 온도변화에 따른 구조물의 변위 및 구조물 단면력을 상세히 검토하여 설계한다.

⑭ 사장교, 현수교 같은 특수교량은 풍하중 등에 따른 동적하중에 대한 안정성이 검토되어야 한다.

⑮ 상부구조에 대한 구조물 각 부위의 단면력 계산결과와 구조상세도를 작성해야 한다.

2) 교면포장설계

① 교량 상부구조 및 형식을 고려하여 적정한 포장방법을 검토한다.

② 소음·진동과 승차감을 고려하여 설계한다.

③ 추정교통량·기후 등을 감안하여 설계한다.

④ 교면포장은 차량하중에 의한 충격, 빗물 등 기상조건 등을 고려하여 교면 구조물이 보호될 수 있고 동시에 차량이 쾌적하게 주행할 수 있도록 설계하여햐 한다.

⑤ 교면포장 설계는 슬래브와의 부착성이 좋고 반복되는 휨응력에 충분히 견딜 수 있도록 하여야 하며 또한 마모 및 방수층 설치 필요성 여부 등을 감독원과 협의후 설계하여야 한다.

3) 부대시설설계

① 난간, 방호책, 중앙분리대, 경계석 등의 크기, 재질 등을 검토하여 도로의 안전기능을 확보하도록 설계한다.

② 신축이음(EXPANSION JOINT)은 상부구조의 형식 및 연장, 사용재료 등을 고려하여 적정한 것을 선정한다.

③ 교명주는 감독원과 협의하여 위치, 크기, 재질등을 설계한다.

④ 교량으로 통과가 예상되는 타기관 시설물(통신, 가스, 상수관등)에 대하여 사전에 관계기관과 협의하고 이를 감안하여 설계하여야한다.

⑤ 도로조명기준 등에 의거 가로등의 간격, 높이, 밝기 등을 검토하여 설계한다. 다만 감독원이 본 과업에서 가로등을 설계하지 않기로 한 경우에는 향후 가로등 설치에 지장이 없도록 가로등 기초 및 배관시설등을 설계하여야 한다.

⑥ 다음의 유지관리시설 설치여부에 대해 감독원과 협의한후 설계하여야 한다.

- 점검통로 및 교각안전난간

- 조명 및 환기시설

- 계측기기

- 기타 유지관리에 필요한시설

4) 가설공법

① 교량의 규모, 지반상태, 동원가능 장비의능력 및 수량, 가설제작장 설치가능여부, 공사소요기간 및 가설공사비 등을 비교검토하여 설계한다.

② 주변시설 및 인근주민에 미치는 소음, 진동과 교통의 혼잡을 최소화 할 수 있는 공법으로 설계하여야 한다.

자. 전기설계

1) 전기설계(가로등/공원등/신호등)의 과업내용은 다음과 같다.

① 한전전원 인입방안

가로등 및 공원등

자동점멸기 설비

교통신호등

관련 배관․배선

2) 전기설계와 관련한 사항은 다음의 법령 및 규정에 명시된 사항을 준수하여 수행하며, 법령 또는 규정이 서로 상충되는 부분이 있을 경우 감독원과 협의하여 결정한다.

① 전기사업법, 동 시행령 및 시행규칙

전기공사업법, 동 시행령 및 시행규칙

전력기술관리법, 동 시행령 및 시행규칙

전기설비 기술기준

내선규정

한전 전기공급약관

한국산업규격(KS) - KSA 3701 도로조명기준

기타 관계 법령

3) 조명설계는 운전자의 피로감과 눈부심이 없도록 설계한다.

4) 수전시설은 한국전력공사와 협의하여 경제적이고 효율적인 방법으로 설계한다.

5) 광원의 종류는 소비전력이 적으며 도로조명에 적합한 것으로 설계하여야 한다.

6) 가로등주의 재질 및 높이는 주변상황 등을 감안하여 선정하여야 한다.

7) 가로등설비는 시설물 유지관리 및 야간범죄의 예방에 용이하도록 배치한다.

8) 가로등 점멸방식은 감독원와 협의후 결정하며, 격등점멸이 가능하도록 한다.

9) 가로등은 광원, 등기구, 등주, 조도, 경간, 기초의 구조, 배관시설, 전력의 공급 등 제반시설을 고려하여 설계한다.

10) 가로등 설치는 도로조명기준 KSA 3701, 지자체의 규정 및 조례에 적합한 설계를 한다.

11) 신호등 설계는 관리주체인 지방자치단체, 경찰서와의 사전협의를 통하여 신호등주의 재질, 규격 등 제반사항을 결정한 후 설계하여야 한다.

12) 공원등은 위치, 지주, 기초의 구조, 통합 폴시설등 제반시설을 고려하여 설계한다.

13) 한국전력공사와 협의하여 지구주변의 전력 및 지구내 전력공급계획을 검토한다.

14) 설계항목 및 설계계산서는 다음과 같다

① 도로 조도계산서

간선의 전압강하 계산서

전선관 규격 및 물량산출

케이블 일람표

케이블 용량 및 규격

등 외형도 및 배치도

분전반 회로도 및 외형도

등기구 상세도

등주 및 제어반 기초 상세도

기타 필요한 자료 및 도면

차. 조경설계

1) 조경설계의 과업내용은 다음과 같다.

현황조사

공원․녹지내 토공설계

보행로축조 및 포장설계

수경시설 및 배수시설 설계

조경식재 및 시설물 설계

기타부대공 설계

2) 일반지침

조경실시설계는 조사설계(측량, 토질조사. 지구단위계획 등)자료 및 각종 영향평가 등의 결과와 협의사항, 개발계획 및 실시계획 승인조건사항, 지자체등 관계기관 협의사항 등을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

수급인은 각종 공법 및 자재를 선정하기에 앞서 우선적으로 가용신기술(공법, 자재)을 확인해야 하며, 여타의 공법 및 자재와 장․단점 등을 비교 검토하여야 한다.

수급인은 실시설계 착수후 각종 기준 및 지침의 제․개정 현황을 확인하여 설계기준서를 작성하고 감독원의 승인을 받아야 하며, 변경시에도 같다.

설계기준서에는 설계에 반영될 주요자제에 대한 사항을 포함하여야 한다.

조경기본설계 성과를 근간으로 하여 설계시점의 현장여건과 연계한 검토․분석을 행하고 공종별로 설계기준안을 작성하여야 하며, 만일 조정이 필요한 경우 감독원과 협의 조치하여야 하고, 필요시 발주자가 지정하는 자문위원의 자문을 받아야 한다.

인접지역의 자연환경 및 토지이용, 공간 분석 및 동선 등 현장여건과 연계한 제반사항을 검토․분석하여 설계 추진하여야 한다.

상위계획에 의하여 제시되는 조경관련 설계기준 및 지침을 수용하여 설계를 시행하여야 한다.

설계에 임하기 전에 사용될 조경수목 및 시설물의 종류, 공법 등에 대하여는 선정기준을 수립하여 감독원과 충분히 검토를 한 후 선정기준에 의하여 결정하여야 한다.

자재의 선정 및 재료(석재, 골재, 완제품 및 수종등) 선택은 반드시 감독원과 사전협의하여 결정하되 주요사용자재는 KS 표시품을 사용하고 KS표시품이 없을때는 감독원과 협의하여 설계한다.

조경 대상지역의 전기 및 통신설비에 관한 사항은 필요시 감독원과 사전협의하여 실시설계에 반영한다.

건축물, 수경시설, 전기시설, 통신시설, 수도시설등 준공후 특별한 관리가 필요한 시설물은 관계기관과 충분히 협의하여 설계하여야 하며, 동 시설물 등에 대한 유지관리 지침서를 작성 제출하여야 한다.

불량식재지반 등 조경공사 시행에 문제점이 있는 부분이나, 조경적처리가 필요한 시설물은 관계기관과 충분히 협의하여 설계하여야 하며, 동 시설물 등에 대한 유지관리 지침서를 작성 제출하여야 한다.

수준높은 설계를 위해 선진외국의 사례등 다양한 자료를 수집하여야 하며, 검증된 최신기술 및 공법을 설계에 반영하기 위해 최대한 노력하여야 한다.

수급인은 설계완료전 발주자와 합동으로 현장부합여부 공동조사를 실시하고 현장부합여부 공동조사서를 작성하여 감독원에게 제출하여야 하며, 조사결과 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 설계에 반영 조치하여야 한다.

3) 세부지침

현황조사

- 현장조사를 통하여 현지의 지형, 지질, 지물 수문, 식생, 토지이용 상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 또는 비디오테이프 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 수집해야 한다.

- 본 지구에 영향을 미칠 수 있는 관계기관의 계획 및 자료를 수집하여 설계자료로 활용하여야 한다.

공원․녹지내 토공설계

- 조성공사의 토공설계자료 및 현장조사결과를 기준으로 공원내 토공계획을 수립하며, 토량이동 및 정지계획은 배수계획, 주변지역 도로, 정지계획 등을 감안 합리적으로 수립하여야 한다.

- 공원의 주요지점, 외곽부, 주변도로의 계획고를 기입하고 주요공간에 대하여는 단면도를 작성하여야 하며, 필요시 현황측량을 하여야 한다.

보행로축조 및 포장설계

- 보행로의 종단 및 포장계획, 부대 시설물의 개략설계를 하고 경계블럭의 규격, 종류 및 포장재료, 구조는 종류별 표준도를 작성 감독원과 협의후 결정한다..

- 다양한 토지이용 및 장소별 포장문양 대안을 제시하고 감독원과 협의 결정하여 설계에 반영하여야 한다.

- 보행로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 하자가 발생할 우려가 있는 부분은 감독원과 협의하여 연약지반 처리공법을 적용하여야 한다.

수경시설 및 배수시설 설계

- 수경시설은 원활한 급․배수가 이루어지고 기능에 적절히 부합될 수 있는 범위내에서 최고의 효과를 낼 수 있도록 한다.

- 수경시설은 설계 및 규모의 타당성을 검토하고 해당 관련 기관과의 협의를 거쳐 사전 협의사항을 근거로 감독원과 협의 설계하여야 한다.

- 공원내 배수처리를 위하여 실개울, open ditch, 지하배수공, 측구, 집수정 등을 설치하고 단지 배수로와 연결시키도록 한다.

- 배수구배는 부유물의 침전이 없고 하수물이 누수되지 않도록하며 역수영향등을 세밀히 검토하여 결정한다.

조경식재 및 시설물설계

- 수종은 시장의 유통현황을 감안하고 향토수종, 내공해성, 내염성수종 등 장려수종을 검토하여 선택하고 이식 가능하거나 이식된 야생수목을 조사하여 활용하여야 한다.

- 대상지역의 식생현황을 조사하고 동 조사결과를 토대로 생태적 조건, 식재위치의 지반조건 등 세부환경, 조경시설 구조물과의 관계, 적정토량의 확보 및 주요부식재경관, 유지관리에 대한 검토분석을 행한후 대책수립 및 설계를 하여야한다.

- 지구내 이식 활용가능한 수목의 수종, 수량, 규격 및 활용가능여부를 조사하여 감독원과 협의 결정하도록 한다.

- 시설물의 설치 위치, 규모, 수량, 종류 등에 대한 사항은 감독원과 협의 결정하도록 한다.

- 가급적 최근 개발 활용되는 국내외 우수시설물을 설계에 반영하도록 하되 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

- 각종 시설물은 기능성, 시공성, 내구성, 안정성, 경제성등을 감안하여 설계하여야하며 신규 개발한 시설물에 대하여는 필요시 구조계산서를 제출하여야 한다.

- 각종 시설물 마감재는 경제성, 내구성, 조형미 등을 감안 대안을 비교 검토한 후 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

기타 부대공 설계

- 대기환경보전법상 비산먼지 대상사업인 조경공사에 대하여 세륜․세차시설을 현장규모에 맞게 감독원과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

카. 폐기물 처리 설계

지구내 기존가옥(공장포함), 구조물, 각종 폐기물 등에 대한 처리방법을 수립하여 그 결과를 실시설계에 반영하여야 하고 별도로 설계서를 작성하도록 한다.

타. 설계도서 작성

1) 실시설계 보고서

① 보고서는 전단계 용역과 실시설계전반에 대한 업무수행결과를 기초로 작성하여야 한다.

② 기술심의 및 자문결과, 각종 조사자료 및 관계기관 협의자료 등을 부록에 수록하여야 한다.

③ 보고서 작성시 내용을 인용한 경우에는 자료의 출처 및 근거자료를 제시 하여야한다.

④ 설계실명제를 위하여 참여기술자 현황( 명단 및 인적사항, 참여내용, 참여기간)을 수록하여야 한다.

⑤ 감독원이 필요하다고 인정하여 요구하는 경우 교량등 주요구조물에 대해 유지관리에 관한 지침서를 별도로 작성하여 제출하여야 한다.

2) 구조 및 수리계산서

① 구조계산서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 설계개요

- 구조계획도

- 설계조건(구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재 및 특성, 지반조건 및 물성치, 사용Program, 설계기준 및 지침, 기타)

- 구조계산 결과

② 구조 및 수리계산서 작성시 유의사항

- 수리 및 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 정리하여 수록하고 손쉽게 검토할 수 있도록 하여야 한다.

- 구조계산서 각 부문별 첫 쪽(PAGE)마다 우측상단에 작성자와 검토자가 적정여부를 확인한 후 서명하도록 한다.

- 구조 및 수리계산서의 모든 내용은 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 기술하고, 중요한 공식 등은 출처 또는 필요시 유도과정이 명시되어져야 한다.

- 구조 및 수리계산서에서 적용되는 설계기준, 가정사항등이 설계계산을 실행하기에 적합한가를 검토·확인 하여야 한다.

- 검증되지 않은 계산방법 또는 자료를 사용하여 얻은 계산 결과에 대해서는 그 근거를 명확히 기술해야 한다.

- 설계계산의 가정사항은 그 근거와 함께 반드시 가정값임을 명시하여야 한다.

- 계산서에는 충분한 스케치, 도면 등을 첨부 또는 인용하여 계산의 실제 내용이 쉽게 이해될 수 있도록 해야 한다.

- 각종 계산에 사용한 전산프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항을 기록하여야 한다.

- 전산 프로그램을 사용하기 전에 그 사용 방법 및 적용 범위가 계산에 적정한지 확인하여야 한다.

- 국제적으로 공인된 구조계산용 범용 전산프로그램 (SAP2000, GTSTRUDL NASTRAN, ADINA, LUSAS, MIDAS 등)이 아닌 경우에는 적정성이 확인된 프로그램을 사용한다.

3) 공사시방서

① 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조등과 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로써 발주자 및 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성하여야 한다.

② 공사시방서는 표준시방서 및 관련 시공기준 등을 참고로 하여 발주자의 제반여건에 맞도록 적합하게 수정·보완하여 작성하여야 한다.

③ 전문시방서에 해당되는 장(DIVISION) 또는 절(SECTION)이 없을 경우에는 전문시방서 구성체계를 감안하여 새로운 장(DIVISION) 또는 절(SECTION)을 신설·추가하여 시방내용을 작성하여야한다.

④ 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 하여야 한다.

⑤ 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다. 표준양식을 사용하도록 하고 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 해야 한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성해야 한다.

⑦ 발주자의 의도를 정확히 파악하고 감독원, 수급인, 감리원 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성하여야 한다.

⑧ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 한다.

4) 실시설계 도면

① 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 한다.

② 도면의 맨 앞에는 전체도면의 목차를 작성하여야 한다.

③ 모든 도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

④ 실시설계 각 구조물 도면에는 설계방법(강도설계법 또는 허용응력 설계법)을 명시하여야 한다.

⑤ 도면의 크기는 세부과업에서 명시되지 않았다면 KS A 5201의 A0 ∼ A4에 준하는 것을 원칙으로 한다.

⑥ 설계도면은 KS A 0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도 통칙)에 따라 작성하며, 모든 도면은 CAD로 작성하여야 한다.

⑦ 적정 축척에 따른 작도를 해야 하며, 가급적 논스케일(Non Scale) 작도는 지양한다.

⑧ 구조물 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계법, 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

⑨ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

⑩ 설계도상에서 구조물의 안정감 및 조형미를 용이하게 판달할 수 있도록 교량등 주요구조물의 종단면도는 수직, 수평방향 축적을 같게하여 작성하여야 한다.

⑪ 실시설계도면 작성시 아래의 경우와 같이 특히 시공에 유의하여야 할 부위나 구조 형태가 복잡한 부위에 대하여는 별도의 설계상세도를 작성하여야 하고, 시공시 유의사항 등을 명기하여야 한다.

- 암거와 원형관 연결부 상세도

- 암거 단면 변화부 상세도

- 암거 수위조절공 상세도

- 암거 수위조절 낙차공 상세도

- 암거 장비투입구 상세도

- 암거 맨홀연결부 상세도

- 옹벽 및 콘크리트 측구의 단부처리 상세도

- 옹벽 신·수축이음 상세도

- 옹벽 단면변화부 상세도

- 옹벽 배수시설 상세도

- 배수로 및 도수로 유입·유출부 상세도

- 교량 및 암거가 사각으로 설치되는경우 예각부에 대한 단부 철근배근 상세도

- 교대 및 암거 날개벽 상세도

- 교명주 설치부, 신축이음, 난간앙카부 등 상세도

- 교량슈 설치 상세도 , 교량점검용 시설의 설치위치 및 방법 상세도

- 부대시설 설치상세도

5) 설계도서

① 설계도서는 수량산출서, 토적계산서, 단가산출서, 일위대가표, 설계예산내역서, 설계도면으로로 구별하여 작성한다.

② 설계예산내역서

설계예산내역서에 지급자재가 있는경우 지급자재내역을 포함하여 작성한다.

- 설계금액은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의거 산정함을 원칙으로 한다. 다만, 간접노무비, 기타경비, 일반관리비 및 이윤은 감독원이 제시하는 요율을 적용한다.

- 실적공사비 적산방식에 의한 예산내역서를 작성하고자 하는 경우는 건교부제정 "토목공사 수량산출기준"에 의거 작성하여야 한다.

- 설계예산내역서 작성은 공사발주 직전 해당 월을 기준으로 작성해야 한다.

- 단가산출은 건설교통부제정 표준품셈 (실시설계가 준공되는 시점의 발행년도)에 의거하되 감독원과 협의후 적용하여야 한다.

- 노임은 시중노임을 기준으로 하여야 한다.

- 자재는 조달청발행 가격정보를 기준으로 하고  동자료에 없는 단가는 물가조사자료의 단가(한국물가협회발행 물가자료, 물가정보 센타 발행 종합물가정보, 한국응용통계소발행 유통물가, 대한건설 협회발행 거래가격)를 적용하고 물가조사자료에 없는 단가는 감정가격, 유사거래 실례가격, 견적가격을 적용하여야 한다.

6) 공사입찰 배부용설계서

공사입찰자에게 배부하기 위한 설계서는 다음과 같이 구성하여 작성하되 공사시방서는 분량을 감안하여 별책으로 작성하며 발주자의 입찰 방침(공구분할, 분리발주등)에 따라 설계서를 작성한다.

① 설계설명서

② 공사시방서

③ 공종별 물공량 내역서

Ⅳ. 토질조사

1 . 과업의 목적

본 과업은 운북 복합레저단지 조성사업 기반시설 실시설계를 위한 조성토지의 토질자료를 제공하여 합리적이고 경제적인 설계를 수행코자 함에 있다.

2. 과업의 범위

본 과업은 인천시 운북동 일원에 위치한 운북 복합레저단지 개발사업의 2,729천㎡에 대하여 토질조사 및 시험을 시행한다.

3. 과업의 내용

가. 현장토질조사

1) 시추개소

시추개소 : 31개소

추정심도 :

개 소	심 도(m)
	계	점 토	모 래	자 갈	풍화암	연 암	보통암
31	588.0	162.5	232.5	9.5	126.0	57.5

2) 원위치 시험

◦ 표준관입시험 : 335회

◦ 핸드오거조사 : 3M

3) 시험굴 조사

◦ 조사 개소 : 5개소

4) 오오거 보오링

◦ 조사 개소 : 5개소

5) 현장토질조사는 현장여건에 따라 변경될 수 있으며 실제에 따라 정산하여야 한다.

나. 실내시험

1) S.P.T 시료

◦ 입도시험 1식

2) 시험굴 시료

◦ 지지력특성 시험 1식

3) 자연 시료

◦ 입도시험 1식

◦ 역학시험 1식

4) 암코아 시료

◦ 암석특성시험 1식

다. 보고서 작성

보고서의 편집은 당 공사와 협의하여 결정하여야 하며, 세부사항은 부문별 과업지시에 따른다.

4. 일반지침

가. 수급인은 과업내용서에 의거 조사하며, 과업내용서에 명기되지 않는 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 관련규정 및 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

나. 현장조사 방법은 조사설계 착수시 사업지구내 토질전반의 개략적인 상황을 파악키 위한 개략조사를 실시하고 설계가 진행됨에 따라 상세조사를 실시하여야 한다.

다. 수급인은 조사지역을 정밀 답사하여 지표 지질조사를 실시한 후 조사에 대한 제반계획을 수립하여 착수전 보고하여야 하며, 조사 목적상 계획의 변경이 있을시는 감독원과 협의하여야 한다.

라. 수급인은 작업현황에 대하여 작업일보를 작성 감독원에게 보고하여야 하며 기계기구이동에 대한 사항은 필히 기입하고 이를 보고 하여야 한다.

마. 수급인은 시방의 해석, 조사자료의 해석등에 있어서 의견의 차이가 있을 경우 감독원의 해석 결과에 따라야 한다.

바. 수급인은 시추 및 원위치시험, 시험굴 굴착 광경을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진촬영하여 기록 사진첩에 작성하여야 한다.

사. 수급인은 현장조사 완료 후 성과를 종합 분석하여 즉시 그 결과를 감독원에게 제출하여야 한다.

아. 본 조사설계 중 토층심도, 원위치시험회수, 실내시험회수 등은 추정설계한 것인바 조사결과에 따라 실제에 맞추어 정산한다.

5. 세부지침

가. 지표지질조사

1) 수급인은 현장답사시 본 지구에 대한 충분한 자료수집 및 현장 지형확인, 노두 등 지표관찰, 사면관찰, 지하수관찰 등에 대한 정밀한 지표지질조사를 실시하여 현장조사시 반영토록 하고 조사결과를 서면으로 보고한 후, 조사보고서에 수록하여야 한다.

2) 지표지질조사는 지표의 암석이나 지층상태를 관찰하여 조사지역내의 지질분포상태, 지질구조, 지사 등을 밝힘으로서 지반의 안정성 여부 등을 규명하는 일련의 조사과정으로서 그 대상과 목적에 따라 조사의 정도가 달라지나 특별한 경우를 제외하고는 일반지질조사와 기초지반조사에 수반되는 지표답사로 실시한다.

나. 시추

1) 시추조사는 NX구경으로 하는 것을 원칙으로 한다.

2) 연암층부터는 코아리프터를 사용하여야 하며, 특히 보통암 및 경암층에 대하여는 다이아몬드 비트, 다이아몬드 리빙쉘, 더블코아 튜브를 사용하는 등 코아회수가 최대가 되도록 한다.

3) 암반 시추시에는 코아튜브를 회수하여 채취된 코아가 회수된 상태대로 흐트러지지 않도록 보관하여야 한다.

4) 시추조사는 토층여건이 설계서와 상이 할 때는 감독원의 승인을 득하여 조사빈도, 위치 및 심도를 변경할 수 있다.

5) 시추지점은 차후 필요시에 찾을 수 있도록 필요한 장치(표시말뚝, 인조점)를 설치하여야 한다.

6) 케이싱은 감독원의 지시가 있을 때까지 빼어서는 아니되며, 지하수위 측정은 24～48시간 경과후 측정한다.

7) 토질이나 암석층을 불문하고 시료가 채취되지 않은 경우에는 특별한 경우를 제외하고는 그 작업을 인정하지 아니한다.  또한 토질 및 암의 분류는 시험결과, 육안 판정에 따른 결과 및 현장관찰 기록등을 종합분석하여 KSF 2324(흙의 공학적 분류방법) 및 지반조사시 암반분류 기준에 따라 분류토록 한다.

8) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

① 조사명

② 조사기간

③ 조사위치 및 표고

④ 조사자

⑤ 시행자

⑥ 시추번호

⑦ 시추 장비명 CORE TUBE 및 CASING 구경

⑧ 각 채취 시료의 위치 및 심도

⑨ 시추중에 나타난 층의 관찰

⑩ 원위치 시험의 심도 및 결과

⑪ 지하수위

⑫ 코아 회수율 및 천공 속도

⑬ 암층천공 압력 및 비트 회전속도

⑭ 표준관입시험 타격회수

⑮ 기타 시추작업중 나타나는 관찰사항

시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

토층 및 암층의 심볼표시

9) 주상도 작성시 흙 분류는 다음과 같이 한다.

① 밀도

- 점토 및 실트 : 매우 무름, 무름, 보통, 굳음, 단단함, 매우 단단함

- 모래 및 자갈 : 느슨함, 보통, 다져짐

② 색  채

파란색, 회색, 갈색, 노란색, 빨간색, 검정색과 필요에 따라 연한, 짙은, 얼룩진 등과 같은 수식어를 사용한다.

③ 기본조직

- 점토, 모래, 실트(매우 가늘다, 보통임, 굵다)

- 자갈(가늘다, 보통, 굵다)

- 점토(성분설명) : 노반토, 오물 등

④ 함수량

- 건조, 습함, 촉촉함 또는 젖은 상태

- 분류의 예 : 굵은 회색질, 토질, 점토약간섞인 모래, 촉촉함

카) 쓰레기 매립지역 조사시에는 매립된 쓰레기시료를 채취토록 하고 구성성분, 함수비,매립심도, 및 매립량등을 조사하여야 한다.

타) 시추완료후 지하수위 측정이 끝나면 시추공에 대한 감독원의 승인을 득한후 폐공처리하여야 하며 그 광경을 작업전, 후로 구분하여 사진촬영하여 결과를 보고해야 한다.

다. 오오거 보오링

저지대의 토성 파악을 위하여 오오거 보오링을 실시하여 채취된 시료 중 대표적인 것은 토성시험에 임하여야 하고, 현장여건에 따라 감독원의 승인을 득하여 조사빈도, 위치 및 심도를 변경할 수 있다.

라. 원위치 시험

1) 표준관입시험

① 표준관입시험은 KSF 2318에 규정한 시험방법에 의거 실시하되 토층이 변화하거나 동일 토층이라도 1.5m마다 1회씩 연결성 있게 실시하여야 한다.

② 케이싱은 시료를 채취할 깊이보다 더 깊이 투입되어서는 아니되며, 채취된 흐트러진 시료는 함수량의 변화가 없도록 밀폐된 용기속에 보관하여야 한다.

③ 용기는 입구가 넓고 금속제 뚜껑을 갖는 유리병으로서 도급자는 각 용기에 방수잉크로서 명칭, 보오링번호, 일자, 시료채취심도, 타격회수, 토질 분류등을 기재한다.

2) 자연시료 채취

① 자연시료의 채취는 KSF 2317에 규정한 시험방법에 의거 연약하고 포화된 점성토를 중심적으로 채취하되 보오링과 병행하여 연약토질의 성질을 연속적으로 파악할 수 있도록 실시하여야 하며 채취심도는 감독원의 지시에 따라야 한다.

② 자연시료채취용 얇은 판의 외경이 76mm 이상으로 내부 간극율 및 면적비와 길이가 규정에 맞는 것을 사용하여야 한다.

③ 자연시료 채취시에는 Piston Sampler를 사용하여 적정한 속도로 채취길이보다 약간 적게 압입하여 압입 종료후 약 5～10분간 방치한 후 180°회전하여 진동없이 들어 올려야 한다.

④ 시료 채취시 채취 심도와 채취기의 길이 측정을 정확히 하여 어떠한 경우라도 채취기 길이보다 많이 압입되어 내부의 시료가 압축되는 경우가 발생치 않도록 하여야 한다.

⑤ 시료채취 위치보다 casing이 깊게 설치하여서는 안된다. casing내에서 채취된 시료는 실내시험에 사용될 수 없으며 재차 채취하여야 한다.

⑥ 자연시료의 채취간격은 감독원의 지시를 받아 실시함을 원칙으로 하나, 점토층의 성질을 파악할 수 있는 간격으로 시행하여야 한다.

⑦ 채취된 시료를 들어올린 후 시료가 충격 및 진동 등에 의해 교란이 되는 것을 방지하여야 하며 시료채취 즉시 ring이 부착된 밀봉마개를 사용하거나 파라핀으로 밀봉하여야 한다.  특히 시추기 엔진에 의한 충격 또는 진동으로 인한 시료교란의 방지책을 수립하지 않았을 경우에는 채취된 시료를 안전하게 처리할 때까지 엔진을 정지시켜야 한다.

⑧ 채취된 시료의 양 즉, 시료회수율은 반드시 보고서에 수록하여야 한다.

⑨ 만일 채취된 시료의 양이 충분하지 못할 경우라도 밀봉하여 실내시험에서 사용될 수 있도록 하여야 한다.

⑩ 채취된 시료가 교란의 가능성이 크거나 교란도가 높은 시료가 채취되었을 경우에는 감독원의 지시를 받아 인접된 지역의 동일심도 혹은 연속된 하부층에서 다시 시료를 채취하여야 한다.

⑪ 표준관입시험은 자연시료 채취가 끝난 후 바로 하부에서 실시하는 것을 원측으로 한다.

⑫ 자연시료 채취된 slime등의 침전물을 제거하기 위하여 공내청소 실시 시 원지반을 손상시켜서는 아니된다.

⑬ 파라핀으로 채취된 재료를 밀봉시는 상단 6mm, 하단 9mm정도의 두께로 밀봉하여야 하며 밀봉전 상부의 흐트러진 시료를 완전히 제거하고 하부의 시료를 1cm정도 파내고 남은 길이를 측정하여 기록하여야 한다.

⑭ 채취된 자연시료는 계속되는 조사작업 및 운반시의 진동, 충격에 교란되지 않도록 사전에 완충재(톱밥, 스폰지)를 넣어서 조사 현장에 준비시켜둔 시료상자에 넣어 직사광선 및 동결을 받지 않도록 조치된 상태에서 보관 및 운반되어야 한다.

⑮ 현장에서 조심스럽게 채취된 불교란 시료라 할지라도 운반중의 부주의로 인해 교란될 수 있으므로 완충재를 넣은 시료상자에 thin wall tube가 서로 맞닿지 않도록 운반하여야 한다.

자연시료채취는 3m, 5m 간격으로 채취하는 것을 원칙으로 하되 조사지점마다 심도를 조정함으로서 지층 전반에 대하여 대표적으로 파악할 수 있도록 배치하여야 하며, 필요한 경우 대표적인 지점에서 full-coring실시를 하도록 한다.

3) 원위치 시험 sampler의 규격

구 분	규 격
표준관입시험	1. shoe가 마모되지 않은 것 2. head의 물이 빠질 수 있는 구멍 및 check ball이 있는 것
자연시료채취	1. thin wall tube는 황동제이어야 하며 날끝 미파손품일 것 2. 외경 76mm, 길이 80cm 이상일 것

마. 시험굴조사

1) 현장답사를 통하여 절토지역(토취장 지역)에서 토질의 변화에 따라 각 구간에서 대표될만한 토질의 노출지점에 시험굴의 위치를 선정한다.

2) 시험굴의 심도는 토사층 1.5∼2m 이상을 기준으로 하되, 각 토질의 대표되는 심도에서 시료를 채취하여야 하며, 시료의 양은 토성시험, 다짐시험, 실내CBR시험 등을 실시할 수 있도록 50kg이상을 채취하여야 한다.

3) 토량환산계수 산출을 위하여 토층 1m∼2m 깊이에서 자연상태의 현장 밀도시험 각 1회, 굴착되어 흐트러진 상태에서 1회의 현장밀도시험을 실시하여야 한다.

바. 실내시험

1) 각종 시험은 한국산업규격의 규정에 따라 시행하여야 하며 변경시 사전에 감독원의 승인을 득하여야 한다.

2) 시험결과의 기록은 한국산업규격 소정 양식에 따른다.

3) 수급자는 각종 실내시험 시료조제 및 시험실시 광경을 각 시료별로 구분 사진촬영하여 제출하여야 한다.

4) 수급자는 실내시험 실시에 있어 공신력이 있는 시험기관에 의뢰 실시하여야 하며 시험계산서 등 제반자료(계산자료 등)에는 책임기술자가 인명날인하여 제출하여야 한다.

5) 표준관입시험, 자연시료, 시험굴조사 및 오오거보오링에 의해 채취된 시료는 토질분류 및 물리적, 역학적 성질을 파악하기 위하여 아래 시험을 실시하여  그 결과를 분석 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

◦ 입도시험

- 함수량 시험	(KSF 2306)

- 비중 시험	(KSF 2308)

- 액성한계시험	(KSF 2303)

- 소성한계시험	(KSF 2304)

- 체분석 시험	(KSF 2309)

◦ 지지력특성 시험

- 입도 시험	(KSF 2302)

- 다짐 시험	(KSF 2312)

- CBR	(KSF 2320)

- 현장밀도시험	(KSF 2311)

◦ 암석시험

- 암석비중, 흡수율	(KSF 2518)

- 압축강도시험	(KSF 3031, 3033)

- 안정성 시험	(KSF 2507)

- 마모율 시험            (KSF 2508)

◦ 역학시험

- 입도시험	(KSF 2302)

- 압밀시험               (KSF 2316)

- 일축압축시험           (KSF 2314)

- 삼축압축시험(UU)      (KSF 2346)

6) 표준관입시험 시료

① 표준관입시험 시료는 각 토층을 대표할 수 있는 시료 중 감독원이 지정하는 시료로 시험을 실시하여야 한다.

② 지정된 시료에 대하여 입도시험(체분석, 침강분석), 함수비, 비중, 액, 소성한계 시험 등을 실시하여야 한다.

7) 자연시료

① 채취된 불교란 시료에 대하여 index test즉, 입도분석(체분석, 침강분석), 함수비, 비중, 액․소성한계시험 및 역학시험을 시행한다.

② 비중이 2.5 미만인 세립토, 냄새가 심하게 나거나 노 건조한 시료로 시행한 액성 한계가 원시료로 시행한 액성한계의 75% 미만일 경우, 자연 함수비가 80%를 초과하는 흙에 대해서는 반드시 유기물 함량 시험을 시행하여야 한다.

8) 압밀시험

① 반드시 24시간 재하를 하여야 하며 재하 하중은 현장 재하중에 성토 또는 예상 구조물하중이 포함될 하중이상으로 재하하여 시험을 실시하여야 한다.

② 압밀계수의 계산은 KS F 2316에 제시된 방법으로 시행하여야 하며, 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

③ log p-Cv 및 log p-Mv curve를 전체 재하하중에 대하여 작성 하여야 한다.

④ 시험결과 과압밀 상태에 있거나, 또는 기타 사유로 곡선에서 선행 압밀 하중을 수정하여 구하여야 할 경우 Schmertman, Casagrande 등의 방법으로 하여 구하여야 하며 수정과정을 보고서에 명시하여야 한다.

⑤ 유기물 함유량이 많거나 또는 자연함수비가 80%이상이 되는 흙에 대하여는 2차 압밀 특성을 추정할 수 있는 필요한 시험을 시행하고, 이를 보고서에 수록하여야 한다.

9) 전단강도의 측정

① 직접전단 시험

㉠ 비소성의 흙 또는 시료의 성형이 불가능하여 일축압축 및 삼축 압축시험이 불가능한 경우를 제외하고는 어떤 경우에도 직접전단 시험을 세립토  에 대하여 실시하여서는 안된다.

㉠ 시험을 시행하여야 할 경우에는 시험전에 시료가 없는 상태에서 하중단계 별로 전단시험시에 발생될 마찰력을 사전에 측정하여 그 결과를 보고서에 수록 하여야 한다.

② 일축압축 시험

㉠ 얇은 관에서 추출된 시료를 반드시 교란된 흙을 제거하여 규격에 맞도록 성형하여 시험을 실시하여야 한다.

㉡ 시험방법(즉, 변형제어법 : Strain Controlled Method, 응력 제어법 :       Stress Controlled Method)을 보고서에 반드시 기록하여야 한다.

③ 삼축압축 시험

㉠ 모든 삼축압축 시험시 모어 원(Mohr's circle)이 반드시 3개 이상이 되도록 시행 하여야 하며 시험 시행전에 시험에 사용될 구속압력을 산정하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

㉡ 비압밀 비배수 시험시 최소한 3개의 모어 원(Mohr's circle)중 1개는 측압이 상재하중 및 예상재하하중(예로서 호안으로 인한 재하중 등)보다    크도록 시행하여야 한다.

㉢ 압밀배수 시험시는 (필요시 실시) 최소한 3개의 모어 원(Mohr's circle)중 1개는 측압이 유효 상재하중보다 크도록 시행되어야 하며, 시험중 발생되는 간극수압을 측정하여 전응력에 의한 모어 원(Mohr's circle) 및 유효응력에 의한 모어 원(Mohr's circle)을 함께 작성하여 보고서에 수록하여야 한다..

④ 베인(Vane) 시험

㉠ 연약 점성토의 전단강도를 측정하기 위하여 소형 기계를 이용하여 현장 및 채취된 자연시료를 대상으로 필요시 실시한다.

㉡ 베인(Vane) 시험 실시는 KS F 2342의 규정에 의거 실시한다.

10) 시험굴 시료

① 시험굴을 굴착하여 대표적인 시료를 채취하여 실내시험에 임하여야 한다.

② 각 시료에 대하여 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 입도시험(체분석, 침강분석), 다짐시험, CBR시험, 현장밀도시험 등을 실시하여야 한다.

11) 암(CORE) 강도

① 보오링 조사결과 채취된 암석CORE중 감독원이 지시하는 시료에 대해서 KSF 3031, 3033에 의한 일축압축강도 시험을 실시하여야 하며, 시료의 직경과 깊이에 대한 비율을 고려하여 측정된 강도를 보정하여야 한다.

② 별도의 지시가 없는 한 압축강도 시험시료에 대하여 강도시험 이전에 비중 및 흡수율 시험을 병행 실시하여야 하고, 강도시험 후에는 안정성 시험을 실시하여야 한다.

12) 기타 과업 수행상 감독원이 필요하다고 인정될 때에는 수급인은 감독원의 지시에 따라 추가시험(과업내용 이외의 별도시험포함)을 실시하여야 한다.

사. 보고

1) 현장조사 착수 및 조사결과 보고시에는 책임기술자의 현장답사의견, 조사계획 및 성과이용에 따른 중간보고 등 제반 일정을 별도 작성, 당해 책임기술자가 직접 보고하여야 한다.

2) 토질조사는 조사목적에 따라 부위별(성토지역 혹은 절토지역) 및 위치별로 조사의 우선순위가 부여될 수 있으며 이에 따라 조사성과의 적기 이용이 가능토록 선 조사 부위는 실내시험 등 제반 후속 조치를 선행하여 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다.

아. 보고서 작성

1) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하고 다음과 같은 내용 등 단지조성을 위한 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 한다.

절·성토 지반의 개략적 특성 언급

토적계산을 위한 보오링 주상도 및 추정단면도

토공량 산정을 위한 토량변화율 및 성토재의 특성

연약지반 판단을 위한 보오링 주상도 및 토층 추정 단면도

연약지반 처리 범위 및 처리공법 추천

지층별 절취방법(토공작업 방법)추천

사면안정 검토를 위한 자료

- 절·성토 사면안정

- 터파기 사면안정

포장단면 결정을 위한 C.B.R

구조물 안정 검토를 위한 자료(침하, 지지력 검토를 위한 제반 역학적 상수)

발생재 유용 검토를 위한 자료

매립쓰레기 부존지역의 확인조사 결과(매립위치, 심도, 구성성분 및 매립량 등)

2) 수급자는 기 조사된 자료를 최대한 수집하여 상관관계를 분석하여 조사계획 반영 및 성과분석에 이용하고 그 성과를 포함하여 보고서를 작성하여야 한다.

3) 보오링 주상도에 사용하는 symbol등 각종 표시 및 기호는 지층이 구분될수 있도록 한다..

4) 수급자는 보고서 작성에 있어 초안을 작성하여 인쇄전에 감독원에 제출하고 내용 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

5) 수급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명날인 하여야 한다.

① 조사명	⑦ 제시험 성과표

② 조사 시행자명	⑧ 시추 주상도

③ 조사요약 보고문	⑨ 토층 단면도

④ 조사개요	⑩ 조사 위치도

⑤ 조사 세부내용	⑪ 조사현황사진

⑥ 조사성과분석 및 공법제시	⑫ 기타 자료

자. 측 량

1) 본 측량은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위한 것으로 필요하다고 판단되면 감독원의 지시에 따라 실시하되 실제에 따라 정산 하는것으로 한다.

2) 본 측량은 공공측량 작업규정에 의거 감독원의 지시에 따라 시행하여야 하며 시행이전에 측량에 관한 세부실시 계획서를 작성하여 사전에 감독원과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

3) 측량에 사용된 원점(가B.M)은 검측에 필요하도록 영구지물에 표시하여 두어야하며 이를 보고서에 수록하여 두어야한다.

4) 측량에 대한 성과는 본 사업지구에 대한 지형측량시 설치한 삼각점 및 수준에 대한 성과를 이용한다.

5) 보오링 기준점에 대한 측량이 완료된후 좌표를 항측도면(CAD)에 삽입하여 표고를 구하여 표고대비표(기준점측량표고 대 항측도상 표고)를 작성하여 비교하고 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

Ⅴ. 3D 시뮬레이션 제작

1. 과업의 목적

본 과업의 목적은 인천시 도시개발공사에서 시행하는 운북 복합레저단지 조성사업에 대한 준공후의 모습을 계획 및 설계단계에서 3차원으로 시각화하여 사용자가 직접 3차원 공간을 이동, 관망하며 검토함으로써 설계품질을 향상시키고 홍보자료로 활용할 수 있는 시뮬레이션 시스템을 구축하기 위함이다.

2. 과업의 기간

본 과업의 기간은 실시설계의 과업기간에 따른다

3. 과업의 내용

가. 개발전(현재)의 모습을 모델링한 후 사업지구 전체에 대한 개관을 보여주어야 한다

나. 전후 좌우 이동 및 회전, 조감 , 투시 뷰 등 다양한 카메라 위치 변경 등이 가능하여야 한다

다. 원하는 주행경로를 선택 시뮬이션 가능하여야 하며 주행 도중 일시정지, 카메라 회전 등을 통한 경관 뷰, 시선이동, 원하는 주행속도 선택 및 변경이 가능하여야 한다.

라. 계획 또는 설계시 적용될 수 있는 다양한 비교안을  검토할 수 있도록 단지와 단지 및 건물 변경 등이 가능하여야 한다

마. 화면내 미니맵을 적용하여, 이동하고자 하는 위치의 선택 이동이 가능하여야 한다

바. 총면적 , 계획인구, 토지이용계획, 녹지율 등의 계획정보 표시가 가능하여야 한다

사. object Animation (자동차, 전철,열기구,하천,분수등.), 건물 및  단지별로 순차적 애니메이션이 가능하여야 한다

아. 동서남북 조망점에서 관망 가능하고 경관 조망권 분석이 가능하여야 한다

자. 사용자가 필요로하는 기능만을 첨가하여 그래픽 인터페이스 디자인 가능하며 프로그램운용이 용이하여야 한다

차. 3차원 모델링시 건축물은 사업지구의 컨셉에 맞게 전체적인 조화와 균형을 유지하여야 한다

카. 다양한 형태의 홍보용 동영상 추출 및 편집이 가능하여야 한다

4. 과업 준수사항

가. 3D  시뮬레이션 제작용역의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 인천광역시도시개발공사의 위상과 이미지에 맞게 기획 제작하여야 한다.

나. 계약후 10일이내에 월 단위 및 계약기간 전체에 대한 제작일정, 인력, 장비투입 등이 포함된 제작계획서를 제출하여야 한다.

라. 발주처의 사정으로 인한 계획변경 사항에 대하여는 적기에 반영될 수 있도록 조치하여야 한다.

마. 3D 시뮬레이션의 최종 납품전, 검수를 거쳐야 하며, 검수 결과 변경사항이 있어 조정이 필요한 경우 계약자는 반드시 발주처의 요구 사항을 수용해야 한다.

바. 최종 납품후에도 (또는 준공일로부터 6개월간) 인천광역시도시개발공사의 변경 요구사항에 대하여 무상 A/S를 제공한다

사. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 수시로 인천광역시도시개발공사와 협의하고 상호 이견이 있을 때는 공사의 의견을 존중한다.

5. 기타 사항

가. 인천광역시도시개발공사의 사전 승인없이 본 용역에 따른 제작물과 각종 자료를 타인에게 양도, 대여할 수 없으며, 3D 시뮬레이션  제작과정에서 알게 된 각종 정보, 자료 등은 보안을 유지하고 외부에 누설해서는 안된다.

나. 용역성과품의 판권과 저작권은 인천광역시도시개발공사가 소유한다.

다. 본 용역에 있어 계약자가 제3자에게 불법, 부당한 피해를 주었을 경우, 계약자가 책임을 진다.

라. 본 3D 시뮬레이션 제작에 있어 저작권, 특허권 등 타인의 권리를 사용할 경우 제작자가 그 권리의 사용에 대한 일체의 책임을 져야 한다.

마. 용역수행 과정상 발생될 수 있는 각종 사고 및 문제에 대해 전적으로 제작사가 책임을 진다.

6. 성과품 제출

가. 시뮬레이션 시스템 구축 용역 결과에 따른  성과품은 각각 CD로 저장하여 20매씩 제출한다.

- 성과품

1) 3D시뮬레이션 데이타 CD 20매

2) 홍보용 동영상 CD 20매

3) DVD 2매

4) 베타테이프 1매

나. 성과품 제출시 사전 교육을 통하여 프로그램 사용에 차질이 없도록 조치한다.

Ⅵ. 모형 제작

1. 과업의 목적

본 과업은 개발계획 변경 승인된 운북 레저단지의 토지 이용 계획도면을      기반으로 모형도를 제작하여 전시홍보 효과와 토지계획의 합리성을 보여      주기 위함이다.

2. 과업의 기간

본 과업의 기간은 실시설계의 과업기간에 따른다

3. 과업의 내용

1) 전시판의 크기는 가로 2.5m, 세로 1.5m로 한다.

2) 전시대의 크기 및 유리 케이스의 크기는 전시판이 크기에 부합하는          적정한 크기로 한다.

3) 구체적인 작업과정 및 필요사양등은 제작시점에 감독과 충분히 상의하여 결정한다

6) 전시물중 고증 및 자문이 필요한 부분은 전문가의 자문 을 받아야 하며      이 때 필요한 자문비용은 제작비에 포함된다.

7) 토지이용 용도에 적합한 모형을 스케일에 맞게 제작하여야 하며             전체적인 균형과 조화를 이루도록 제작하여야한다.

8) 기본판 은 9mm합판위에 포멕스 처리후 락카 페인트로 마감 처리한다.

9) 주요건물의 사용재료는 아크릴판, 아크릴파이프, FRP수지, 포멕스 등

을 조합하여 제작 후 락카, 바닐락 페인트로 마감한다.

10) 주요 시설물 및 설명이 필요한 위치에 팻말 및 LED 조명을 제작설치       하여 위치 확인이 가능토록 한다.

11) 스위치 판은 아크릴을 가공하여 고급스럽고 심플하게 제작한다.

12) 스위치는 누름버턴 스위치를 사용한다.

13) 사업명은 아크릴판에 글씨를 조각한 후 바닐락 페인트로 고급스럽게 마감한다.

4. 기타사항

1) 최종납품 전에 시사회를 통하여 초종검토를 받도록 하고 검토결과를      반영하여 납품한다.

2) 납품장소는 발주처가 지정하는 전시회 장소에 전시납품토록 한다.

Ⅶ. 성과품 작성

성과품 작성수량은 아래 수량을 원칙으로 하되 감독원 필요 요청시 추가하여 납품하여야 하며,    모든 성과물은 전산화일(CD)로 별도 제출하여야 한다.

공 종	성 과 품 명	규 격	수량	비 고
토질조사	가. 조사보고서	A4	50 부
	나. 조사보고서 CD		1 부
	다. 시료보관 상자		1 식
	라. 조사야장		1 식
	마. 현황조사 사진첩	천연색 사진	2 부
	바. 기타 발주자 요구자료		1식
실시설계	가. 실시설계 보고서	A4	50 부	영문 50부 별도
	나. 구조 및 수리계산서	A4	5 부
	다. 입찰 배부용설계서		30 부	부수는 입찰참가업체 예상수에따라변경가능
	라. 설계예산내역서	A4	5 부
	마. 단가산출서	A4	5 부
	바. 일위대가표	A4	5 부
	사. 수량산출서(토적계산포함)	A4	5 부
	아. 실시설계도 (A1)		5 부
	자. 실시설계도 축소도면		5 부
	차. 관련 종합망도		5 부	전산자료로 납품
	카. 블럭면적계산부		3 부
	타. CD-ROM 화일		1식	전체용역성과수록
	파. 기술심의자료		1식	기술심의시
	하. 각종 인․허가 자료		1식
	거. 기타 발주자 요구자료		1식
3D시뮬레이션	가, 3D시뮬레이션 데이타	CD	10매
	나, DVD		2매
	다, 베타테이프		1매
모형제작	가, 모형도		1식

※공구분할시는 각 공구당 위의 해당수량을 별도로 제출한다.

Ⅸ. 예정공정표

구 분	내 용	착수일로 부터
		3월	6월	9월	12월	15월	18월	비고
착수단계	착 수 계 제 출
	과업수행 보고서
	전차용역 결과분석
	및 착 수 보 고
	설계 기준서 작성
실시설계단계	토 질 조 사
	토 목 부 문
	전 기 부 문
	조 경 부 문
	부대공사 및 기타
	성과품 작성
3D시뮬레이션
모형제작