책임감리용역 과업설명자료

( 복합숙박센터 건립사업 전면책임감리 용역 )

‘07. 10

본 과업설명 자료는 우리公社가 시행하는 감리전문회사 입찰참가자격 사전

심사에서 참가업체가 준수해야 할 사항을 기재한 것으로 모든 입찰희망자는

이를 열람하여야 합니다.

전면책임감리용역 과업설명자료

1. 용역명

복합숙박센터 건립사업 전면책임감리용역

2. 감리개요

가. 위     치 : 인천광역시 중구 항동 3가 7번지외 6필지

나. 대지면적 : 7,090.5 ㎡

다. 층    수 : 지하2층 지상15층 (객실230실)

라. 용역기간 : 공사기간(착공일~준공일, 19개월) + 15일 (공사불능일 포함)

※ 공사기간은 동절기, 공휴일, 우천등 공사불능 일수 및 조경공사기간 포함

3. 감리공종 : 감리대상 건축물과 관련된 전공종

4. 착수일 : 감리대상 아파트 건설공사의 착공일

(건설공사의 착공일 및 준공일은 현장 여건 및 공사 사정에 의해 변동될수 있음)

5. 감리기간 및 조정

가.  감리기간 : 공사기간(착공일~준공일, 19개월)+15일 (공사불능일 포함)

나.  감리기간의 조정 : 다음 경우에 한하여 협의 조정가능

(1) 당해 건설공사의 공사기간이 조정되는 경우

(2) 당해 건설공사의 규모가 변경되어 감리기간의 조정이 필요한 경우

(3) 기타 계약자의 책임없는 사유로 인하여 감리기간의 조정이 필요한 경우

6.  감리원의 배치

가.  소요 감리원 산정

(1) 건설교통부에서 ‘06. 12. 14일 고시한 “건설공사 감리대가기준”에 의한 보통공종의 공사비 규모에 따라 산정한 소요인원(전기외 공종)

(2) 전력기술관리법에 의한 보통공종의 공사비 규모에 따라 산정한 소요인원(전기공종)

(3) 정보통신공사업법령에 의한 소요인원(통신공종)

(4) 소방시설공사업법시행령 및 시행규칙에 의한 소요인원

(5) 감리사(고급감리원) 기준

* 125.22 인․월(상주 106.44인․월,  비상주 18.78인․월)

나.  감리원의 자격

(1) 건설감리원 : 건설기술관리법시행령 제51조의2 및 제52조에서 정한 자격자

(2) 전기감리원   : 전력기술관리법시행령 제21조 제1항에서 정한 자격자

(3) 통신감리원   : 정보통신공사업법시행령 제8조에서 정한 자격자

(4) 소방감리원 : 소방시설공사업법시행령 제9조 및 제11조에서 정한 자격자로서 전문소방공사감리업자로 등록한자

다.  감리원 배치

(1) 감리용역 착수시에 별첨#1 (감리단의 구성)에 의거 감리원의 직종, 등급,  인원수, 기간 등이 포함된 감리원 배치계획표를 작성(경력사항  확인서 포함)하여 평가서와 함께 제출.

(2) 발주시 적용했던 상주 및 비상주 감리원 배치비율을 감리용역 수행중이라도 공사의 여건, 특수성에 따라 상주 및 비상주 감리원의 비율 변경은 "公社"의 사전승인을 득한후 업무 수행.

라. 책임감리원의 배치

- 300억원 이상 500억원 미만인 건설공사

∙ 총공사비 200억원이상인 건설공사에 대한 감리경력 1년이상인 수석감리사

마. 예시된 소요 감리원 산정은 감리대가 산정용으로 작성된 것으로 감리용역 착수후 15일 이내에 당 공사의 전공정을 소요공사기간 내에 소요 품질과 공사비 관리가 가능토록 관계법령에 적합한 배치계획표를 작성 발주자의 승인을 받아야 함

7.  감리업무 내용 및 근무지침

가. 감리업무 내용

관계법령, 계약조건 및 업무편람에 의하되 세부 사항은 우리 公社 "업무편람"에 의함

나. 감리원의 근무지침

감리원은 당해공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, “公社”의 지시사항 및 기타 관계규정대로 시공되는가를 공사 시행시 수시로 입회하고 공정단계별로 시의 적절하게 확인, 검측하여 엄격하게 품질관리를 하여야 하며, 기타 시공자에게 품질, 시공, 안전관리에 필요한 기술지도 및 이행여부를 확인하는 등 부실공사 방지를 위하여 감리원으로서의 의무를 성실히 수행하고 그 책임을 진다.

8.  감리비 계상 및 조정

가. 감리비 계상 기준 : ‘06.12.14일 고시한 “건설공사 감리대가기준”에 의함

(1) 직접 인건비 : 상주, 비상주 감리원의 급료, 제수당, 상여금, 퇴직적립금, 산재보험금을 포함한 금액으로 한국건설감리협회가 통계법에 의하여 조사․공표한 노임단가로 월정액 계상

(2) 직 접 경 비 : 현장상주 감리원의 주재비, 출장여비, 사무원 급료, 감리보고서작성비 등 계상

(3) 제경비 및 기술료

(4) 부가가치세(손해보증보험료를 제외한 금액에 대하여 계상)

(5) 손해보증공제(보험)료

나.  감리비의 조정 : 다음 경우 중 “公私”의 승인을 득한 건에 한하여

감리비 조정가능

(1) 당해 공사기간의 변경으로 건설공사 감리대가 기준에 의한 감리원 최소배치 기준에 따라 감리원수를 조정 하여야 할 필요가 있는 경우

(2) 당해 공사의 설계변경으로 공사계약금액(지급자재비 포함)이 당초 금액보다  10％ 이상 증감된 경우. 단, 물가변동으로 인하여 공사 계약금액이 조정된 경우에는 제외

(3) 건설기술용역계약 일반조건 제15조의 규정에 따라 “물가변동으로 인한 계약금액의 조정” 사유가 발생한 경우

(4) "公社"의 요구에 의한 업무변경이 있는 경우

(5) 당해공사의 실착공일과 감리용역 실착수일이 상이한 경우

- 전체 감리기간에서 감리인월수를 등가배분하여 상이한 기간만큼 감리 인․월수를 감하고 대가조정함

(6) 감리원의 책임있는 사유로 실상주기간이 감리용역 계약상의 상주기간과 차이가 발생하는 경우

(7) 건교부 고시 건설공사감리대가기준 제7조 제②항  제1호 내지 제3호의 기준에 따라 당해공사의 특수성으로 인하여 감리원수를  조정하여야 할 필요가 인정되는 경우

9.  기성금액 : 관계법령에 의거하여 기성 요청시 지급

10. 감리사무실 : 건설공사 수급자가 설치

가. 시험실과 통합으로 설치하되 공사용 진입로가 있는 현장입구 등 현장관리가  용이한 위치에 설치

나. 사무용품 및 집기류 : 감리회사 부담

11. 특기사항

가. 책임감리원은 Fast Track으로 진행되는 본 공사의 특성을 감안하여 감리업무 착수일로부터 30일이내에 기본설계, 우선 시공분 실시설계도서(도면 및 내역수량) 및 실시설계도서를 검토하여 시공에 불합리하거나 현장상황과 상이한 부분과 공사기간, 공사비 관리에 위험요소가 있을 경우에는 당 公私에 보고하여 승인을 받고 시공하여야 한다.

나. 설계 ․ 시공병행방식(Fast-Track)에 따른 부분공사의 시공범위는 아래와 같다.

- 토목공정 : 토공 및 흙막이공사, 지반보강공사, 토목구조물공사, 지하층 구조물공사 등

- 기타공정 : 가설공사(현장사무소, 가설울타리 등 일반적인 가시설물 공사의 모든 종류), 대지내 기존건축물의 철거공사 등

- 환경오염 저감시설(공사용) : 비산먼지방지시설, 특정공사신고

다. 건축물의 외부 및 내부 마감자재 중 색상. 크기 등 미관에 영향을 미치는 자재선정시에는 시공사가 Sample Board 및 검토사항을 감리단에 제출하고, 감리단은 내부 검토후 당 "公社"와 사전 협의후 승인하여야 한다.

라. 건설기술관리법에 규정되지 않은 전력시설물공사, 소방시설 관련공사, 정보통신공사는 관계법령(전력기술관리법, 소방시설공사업법, 정보통신공사업법)에 규정된 바에 의하여  감리업무를 수행하여야 한다.

마. “감리대가 산정을 위한 공사비”와 “감리기간"은 추정하여 산정하였으므로, 감리자는 실시설계 확정후 1개월 이내에 건설공사 예정가격(지급자재비 포함)에서 부가가치세를 제외한 금액 및 실제 공사기간을 기준으로 감리인월수와 감리기간을 산출하여 설계변경 및 적정감리비로 대가조정을 요청하여야 한다.

바. 감리업무 수행시 도시엑스포 전 호텔개관에 관련된 업무에 적극 협조하여 호텔 개관에 차질이 없도록 협조하여야 한다.

사. 우리公社에서는 감리점검 및 평가 등을 통하여 부실감리가 발견될 경우 관계법령에 따라 부실벌점을 부여하고 관계기관에 그 내용을 통보하는 등 부실 감리에 대한 조치를 취할 수 있다.

아. 당해 용역은 건설기술관리법시행령 제54조의10 규정에 의한 “감리손해배상제도” 적용 대상용역이며 계약자는 과업지시서에 따라 당해 용역에 대해 손해배상을 보증하여야 한다.

자. 감리자는 관계법령에 의해 감리원 배치현황을 해당 협회에 제출할 수 있도록 관련 서류를 “공사”에 제출하여야 하며 또는 소방관서에 신고하여야 한다. 감리원 변경시에는 “공사”의 사전 승인을 득한 후 변경 신고 하여야 함.

- 건설감리원 : 한국건설감리협회

- 전기감리원 : 한국전력기술인협회

- 통신감리원 : 한국정보통신공사협회

- 소방감리원 : 관할 소방관서

차. 본 PQ평가시 제출된 기술제안서의 내용은 성실하게 이행될 수 있도록 적극 조치하여야 한다.

카. 감리보고서(SPRS) 및 계약자간 통합기술정보시스템 업무가 원활하게 이루어 질 수 있도록 각종 전산장비 배치등 관련업무를 성실히 수행하여야 한다.

타. 시설공사 준공일전 사용검사를 완료하여야 하고, 준공계 접수시 첨부시켜야 한다(단, 수급자의 책임없는 사유로 사용검사 불가할 시는 임시 사용검사 대체하고 그 사유를 명기한다.)

파. 설계변경(물가변동 포함)에 대하여 당 公社에 보고시 비상주 감리원의 검토의견(적용단가, 수량 및 설계변경에 대한 타당성 등)을 포함시켜야 한다.

하. 당 公社 건설관리시스템 자료입력에 요구되는 컴퓨터시스템을 현장에   갖추어야 하고, 기성신청시 해당 기성분에 대한 자료입력 완료여부를 책임감리와 당 公社에게 확인받아야 한다. 다만, 설치시기는 우리公社가 별도로 지정한다.

거. 현장 폐기물 발생 및 처리와 관련하여 책임감리원은 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 및 폐기물 관리법등 관계 법령을 숙지후 감리업무에 임하여 환경문제 발생 방지에 최선을 다해야 한다.

너. 감리보고서는 건설교통부고시 제2005-547(‘05.12.30)호 건설공사 감리보고서 작성지침에 의거하여 작성 제출한다.

더. 비상주감리원은 월1회 이상 현장을 방문하여 업무를 수행하여야 하며, 수행한 업무 내용을 상세하게 기록 관리하여야 한다.

러. 당해 건설공사의 효율적인 감리업무 수행을 위하여 감리업무를 총괄하여 관리할 자를 두며 그 총괄자는 건축책임감리원으로 한다.

머. 공사의 착공시기는 현장여건, 인․허가, 기타 여건에 의해 변동이 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 감리원 배치계획의 조정을 公社와 협의하여야 합니다.

〔별첨 1〕

1. 감리단의 구성

감리대상 시설물의 규모 및 공종에 적합하다고 인정되는 감리원으로 감리단을 구성하고, 공사추진 내용에 맞게 배치하되 현장여건에 따라 전체 인․월수 범위내에서 당 公社와 협의하여 조정가능

															비상주감리원
															비상주책임					건축분야 1인
									책임감리원
															건축분야					각 분야별 1인이상 씩 배치하되 각 분 야별로 감리사 (고급)이상인자 배치
															토목분야
									건축 1인
															조경분야
															기계분야
															전기분야
															정보통신분야
															소방분야
건축분야				토목분야				조경분야					기계분야					전기/정보통신					소방분야
건축 3인				토목 1인				토목겸직					기계 1인					전기 1인 정보통신 1인					소방 1인

※ 상주 소방감리원

기계분야 및 전기분야의 자격을 모두 갖춘 소방기술자 1인 배치(소방기술사 1인도 가능)를 원칙으로 한다.

(단, 동시자격을 갖춘자가 없을 경우에는 기계 및 전기분야 감리원을 각   1인씩 배치할 수 있으나 초과되는 감리대가는 낙찰자 부담으로 한다.)

※ 상주 감리원 : 비상주 감리원 = 85 : 15

2. 감리원별 투입예정일 등

◦ 용역기간

- 공사착공 ~ 공사준공 + 14일

분야 및 직책		등 급	투입(예정)예정월	비 고
상주	책임 감리원	수석감리사	2007. 11. 19.	평가대상
	건축1 감리원	감리사보	2007. 11. 19.	평가대상
	기계1 감리원	감리사보	2008. 03. 01.	평가대상
	토목 감리원	감리사	2007. 11. 19.
	전기1 감리원	특급	2008. 03. 01.	평가대상
	통신1 감리원	중급	2008. 03. 01.	평가대상
	소방1 감리원	고급	2008. 03. 01.	평가대상
비상주	건축 비상주책임감리원	수석감리사	2007. 11. 19.	평가대상
	건축 비상주감리원	감리사 이상		-
	토목 비상주감리원	〃		-
	조경 비상주감리원	〃		-
	기계 비상주감리원	〃		-
	전기 비상주감리원	고급 이상		-
	정보통신 비상주감리원	〃		-
	소방 비상주감리원	〃		-

※ 위 감리원별 투입예정월은 건설공사 발주시 산정된 공사기간을 기준으로 작성되었으며 당 公社의 사업추진 여건변화에 따라 실제 투입일은 다소 변동이 있을 수 있음.

※ 공정에 따라 공사 초기에 상주하지 않는 공종에 대한 초기 검토는 비상주 감리원이 검토함

참여율 산정을 위한 감리원 배치계획 (예시)
용 역 명 : 복합숙박센터 건립사업 전면책임감리용역(예시)
분야	등급	일수	개월	인월수	비고	등급환산계수
책임감리원	수석감리사	000	00.00	00.000
건축1 감리원	감리사	000	00.00	00.000
건축2 감리원	감리사보	000	00.00	00.000
건축3 감리원	감리사보	000	00.00	00.000
기계 감리원	감리사보	000	00.00	00.000
토목 감리원 (조경겸직)	감리사	000	00.00	00.000
계				00.000
전기 감리원	고급	000	00.00	00.000
계				00.000
통신 감리원	고급	000	00.00	00.000
계				00.000
소방 감리원	특급	000	00.00	00.000
총계	9명			000.00

※ 상주감리원 : 비상주감리원 = 85 : 15

[별첨 2]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제 1 조(목적) 이 협정서는 아래 사업을 ○○○와 ○○○사가 재정․경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물자 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공등을 위하여 공동연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명：

2. 계약금액：

3. 발주자명：

제 2 조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭：○ ○ ○

2. 주사무소소재지：

3. 대 표 자 성 명：

제 3 조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자：	)

2. ○○○회사(대표자：	)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제 4 조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제 5 조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제 6 조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제 7 조(하도급) 공동수급체의 구성원은 다른 구성원의 동의를 받지 않고 분담부분의 일부를 하도급할 수 없다.

제 8 조(거래계좌) 기성대가등은 공동수급체의 대표자 또는 각 구성원의 다음 계좌로 지급받는다. 다만, 선금은 공동수급체 대표자의 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자)：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

2. ○○○회사：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제 9 조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○：          %

2. ○○○：          %

②제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부 구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제 10 조(손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제 11 조(권리․의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제 12 조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호에 1에 해당하는 경우외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날 까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이  발주기관의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제 13 조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제 14 조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에서 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20      년      월      일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

[별첨 3]

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제 1 조(목적) 이 협정서는 아래 사업을 ○○○와 ○○○사가 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물자 또는 용역에 대한 계획․시공 등을 위하여 공동으로 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명：

2. 계약금액：

3. 발주자명：

제 2 조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지․대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭：○○○

2. 주사무소소재지：

3. 대 표 자 성 명：

제 3 조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자：	)

2. ○○○회사(대표자：	)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구등의 권한을 가진다.

제 4 조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제 5 조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제 6 조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다,

제 7 조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제 8 조(거래계좌) 선금 및 대가 등은 공동수급체의 대표자 또는 각 구성원의 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자)：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

2. ○○○회사：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제 9 조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. 일반공사의 경우

가) ○○○건설회사：토목공사

나) ○○○건설회사：포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사：설비설치공사

나) ○○○제조회사：설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제 10 조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여는 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제 11 조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 당해 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제 12 조(권리․의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제 13 조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호에 1에 해당하는 경우외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날 까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 연대보증인이 당해구성원의 분담부분을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해 요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제 14 조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제 15 조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

20      년      월      일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

[별첨 4]

서 면 질 의 서

◦ 용 역 명 : 복합숙박센터 건립공사 전면책임감리용역

업 체 명		전화번호
대 표 자		팩 스
소 재 지		e-mail
ꋪ 질의사항 ※ 세부평가기준 및 과업설명자료를 다시 한번 숙지하시고 질의하여 주시기 바랍니다 2007. . 질의자 : (주)○○감리전문회사 홍 길 동 (인) 인천광역시도시개발공사 사장 귀하