과  업  내  용  서

- 숭의운동장 도시개발사업 지장물 철거 및 폐기물 처리공사 실시설계 용역 -

2007. 10

목     차

제1장	과업의 개요	----------------------	1
제2장	일반사항	----------------------	2
제3장	과업의 주요내용
	1. 과업의 기준 및 범위 2. 과업의 세부사항 3. 종합보고서 작성 4. 설계서 작성 5. 일반 및 특별 시방서 작성 6. 관련 도면 작성	---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------------	8 9 11 11 11 12
제4장	성과품	----------------------	13
※ 붙임문서

제1장 과업의 개요

1. 과 업 명

◦ 숭의운동장 도시개발사업 지장물 철거 및 폐기물 처리공사 실시설계 용역

2. 과업의 목적

◦ 숭의운동장 도시개발사업의 신속하고 원활한 사업추진을 위하여 사업대상지내 지장물 철거 및 폐기물 처리비용을 산정하고자함.

3. 개  요

◦ 위    치 : 인천광역시 남구 숭의동 180-6번지 일원

◦ 용역범위 : 숭의운동장(종합운동장, 야구장, 체육회관 등) 지장물 철거 및 폐기물 처리비용 산정

◦ 용역기간 : 계약일로부터 30일간

4. 과업의 범위

◦ 지장물 현황조사

◦ 지장물 철거공법 검토 및 대안 제시

◦ 지장물 철거 물량 산출 및 설계서 작성

◦ 폐기물 물량 산출 및 설계서 작성

◦ 지장물 철거 및 폐기물 처리공사 예정 공정표 작성

◦ 철거대상지내 쓰레기 투기 방지시설 설계

제2장 일반사항

1. 적용범위

◦ 본 과업내용서는 숭의운동장 도시개발사업을 위한 지장물 철거 및 폐기물 처리공사 실시설계 등을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 과업내용서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 발주자의 제규정 및 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독자와 협의하여 수행하여야 한다.

2. 법규 우선 준수

◦ 계약자는 본 과업내용서 내용이 관련법규와 상호 모순될 경우(과업수행 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다) 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

3. 용어 정의

가.“발주기관”이라 함은 본 용역을 발주한 “인천광역시도시개발공사”를 말한다.

나.“계약담당자”라 함은 용역계약업무를 담당하는 발주기관 직원을 말한다.

다.“계약자”라 함은 발주기관과 기술용역계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

라.“감독자”라 함은 계약자가 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘․감독할 수 있는 자로서 발주기관이 임명․통보한 직원을 말한다.

마.“설계도서”라 함은 계획도면, 설계내역서, 과업내용서, 발주기관이 특히 필요  하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 말한다.

4. 용어해석의 우선순위

가. 본 과업내용서에 사용된 용어의 해석은 다음 각호의 순서로 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

1) 계약문서(이 과업내용서를 포함한다)

2) 건설기술관리법, 동법 시행령 및 동법 시행규칙

3) 기타 관련 법규

4) 한국산업규격(KS)

5) 기술용어사전

6) 한글맞춤법

7) 교육부 외래어(기본외래어 용어집-국립국어연구)

나. 과업내용서상에 용어 해석의 차이가 있을 경우에는 감독자와 계약자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

5. 용역감독의 권한

가. 용역감독

◦ 감독자는 본 과업을 수행함에 있어 수시로 계약자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 과업 수행상태

3) 기타 확인이 필요한 사항

나. 용역점검

◦ 감독자는 성과물의 품질 확보를 위해 계약자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약자는 감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

6. 계약자의 책임

가. 책임한계

1) 감독자는 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 계약자의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 계약자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약자는 용역 준공 후에도 이러한 사항에 대해 발주기관의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약자의 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 계약자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 입혔을 경우 이에 대한 손실보상 등 책임을 져야한다.

3) 계약자는 감독자에게 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

나. 지시의 이행

◦ 감독자가 용역업무의 수행에 관하여 사업책임기술자(이하“책임기술자”라 한다)에게 업무지시서를 통하여 지시한 경우 사업책임기술자는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명 날인한 후 제출하여야 한다.

다. 관계기관 등 협의

◦ 과업수행을 위해 요구되는 관계기관 등과의 협의 시 필요한 발주기관의 요구사항에 대하여 계약자는 성실히 이행하여야 하며, 감독자의 요구 시 협의문서 및 회의록 등 협의자료를 정리하여 제출하여야 한다.

라. 공정관리

◦ 계약자는 과업수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검 관리하여 과업기간 부족으로 인한 부실계획이 수립되지 않도록 하여야 한다.

마. 문서의 기록비치

◦ 계약자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관 등과의 협의사항, 감독자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 감독자의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

바. 재조사

◦ 본 과업을 수행함에 있어 감독자가 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 계약자는 이에 따라야 하고, 이에 따른 비용은 계약자 부담으로 하여야 한다.

사. 안전관리의 의무

◦ 계약자는 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 제반작업 수행시 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

아. 법률준수의 의무

◦ 계약자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

자. 용역수행자의 교체

◦ 본 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 책임기술자 또는 용역에 참여하고 있는 기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독자가 인정하는 경우 계약자에게 교체를 요구할 수 있으며 계약자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

7. 착수신고서 및 기타제출

◦ 계약자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.

가. 착수계(붙임1 참조)

나. 책임기술자 선임계

다. 책임기술자 사용인감계

라. 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

마. 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

바. 예정공정표

사. 분야별 용역 수행자 명단(붙임2 참조, 이력서 및 기술자격증 사본)

아. 보안각서 및 보안대책(붙임3, 4 참조)

자. 기타 발주자가 요구하는 사항

8. 과업수행 보고

가. 계약자는 주 1회 정기적으로 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 기간 중에 수행한 과업내용 및 예정과업내용을 상세히 기술한 주간 공정보고서(붙임5 참조)를 제출하여야 한다.

나. 당초 예정공정보다 현저히 지연되었을 때에는 만회대책을 수립하여 발주기관에 보고 및 이행하여야 한다.

다. 기타 발주기관에서 요청 시 수시보고를 하여야 한다.

9. 설계자문

가. 감독자는 과업수행 중 중요한 사항의 결정을 위해 당해 전문가에게 자문을 받을 수 있으며 계약자는 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 감독자가 요구하는 시기에 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

나. 계약자는 설계자문 결과 제시된 의견에 대해서는 감독자와 협의한 후 설계에 반영하여야 하며 자문결과를 보고서에 기술하여야 한다.

10. 보안 및 비밀유지

가. 계약자는 발주기관 등에게 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약자가 져야 한다.

나. 계약자는 보안대책을 수립하여야 하며, 착수계와 함께 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

다. 용역참여자가 교체될 시에는 인계․인수를 철저히 하고 감독자의 승인을 받아야 하며, 과업수행에 차질이 없어야 한다.

라. 계약자는 본 용역의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

마. 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정․부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

바. 계약자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

11. 설계변경 등

가. 발주기관은 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 계약자는 이에 따라야 한다.

1) 발주기관의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

2) 지자체 또는 관계기관 등과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) 계약자의 귀책사유가 아닌 용역의 일시정지 등에 따른 과업기간의 연장

4) 사업 추진계획 변경에 따른 사업규모 등이 변경될 경우

나. 계약자는 다음의 경우에는 발주기관에 서면으로 계약기간의 변경을 요청하여야 한다.

1) 상위계획의 변경 등으로 과업 기간 내 과업준공이 어렵다고 판단될 때

2) 계약자의 귀책사유가 아닌 관계기관의 협의 및 검토 지연 등으로 인하여 용역과업추진이 지연될 때

3) 천재지변 등 불가항력으로 과업수행이 불가능할 경우

4) 기타 발주기관이 필요하다고 판단될 때(발주기관에서 변경, 일시정지 지시할 수 있음)

12. 성과물 제출

가. 계약자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여 제출하여야 한다.

나. 감독자는 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 계약자는 이에 따라야 한다.

다. 계약자는 모든 제출물에 대하여 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체 없이 재작성하여 제출하여야 한다.

라. 계약자가 제출한 제출서류가 계약에 위배되는 경우 계약자는 감독자가 검토․ 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

마. 본 과업과 관련된 저작권 등에 관한 사항은 발주기관에 귀속된다.

제3장 과업의 주요내용

1. 과업의 기준 및 범위

◦ 본 과업은 환경부 및 정부기관에서 제정한 각종 시방서 및 규정, 지침과 본 과업내용서에 의거하여 시행하여야 하며, 소음․진동 규제법, 수질환경보전법, 대기환경보전법, 토양환경보전법 및 폐기물 관련 법규 등 제반규정과 건설교통부 제정 각종 시설기준 등에 맞추어 시행토록하고 용역설계 시 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 본 과업 착수와 동시에 예정공정표를 제출하여야 한다.

나. 제반 성과품은 준공 3일전에 사전심사를 거친 후 납품하여야 한다.

다. 납품 검수 후라도 관련기관의 지적사항 또는 발주기관의 계획변경이 있을시는 지체 없이 보완해야 한다.

라. 본 과업 수행에 따른 물건조사 시 민원사항이 발생되지 않도록 시행하여야 한다.

마. 실시설계 전 사전에 지장물 철거공법(발파해체 또는 기계식 철거공법 등)의 주요특징과 비교검토(안)을 발주기관에 제출하여야 한다.

바. 지장물 철거대상 조사는 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 철거대상 물건의 조사는 정확히 작성하여야 한다.

2) 철거대상 계획도는 각 물건별(건물, 공작물 등)현황을 근거로 하여 지적도에 배치하여 각종사항을 표기한다.

3) 철거대상 물건은 반드시 지번별로 표기를 하여야 한다.

사. 폐기물 처리계획 수립 시 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 건축물 및 공작물 철거로 발생되는 콘크리트 및 시멘트류 등의 처리는 수거, 파쇄하며 발생물은 관계법령에 의거하여 적법하게 처리되도록 설계한다.

2) 각종 폐기물은 관련 법령에 의거 성상별로 재활용, 소각, 매립 등으로 구분하여 수량을 산정하고 분리처리토록 설계한다.

3) 석면을 함유한 폐슬레이트 및 텍스류 등의 지정폐기물은 별도로 물량을 산출하고 관계법령에 의거하여 적법하게 처리되도록 설계한다.

아. 분뇨의 경우 전량 수거하여 처리하도록 설계한다.

자. 사업대상지 내에 있는 농업용 및 상수도용 관정이 있는 경우 폐공토록 설계한다.

(폐공은 지하수업체에서 실시하며 지번별로 설계토록 한다)

차. 도면상에 표기되지 않는 부분(지하구조물 등)은 별도 조사 후 설계한다.

카. 본 과업내용서에 명기되는 않는 경미한 사항은 발주기관의 지시에 따라야 한다.

2. 과업의 세부사항

가. 물건별 조사

1) 지장물 : 건축물 관리대장 및 물건조서를 기초로 하여 현장조사를 실시하여야 한다.

① 구조물별 구분

- 콘크리트류 : 천장, 바닥, 기둥, 벽체, 지붕 등

- 목재류 : 천장, 바닥, 기둥, 벽체, 지붕 등

- 고재류 : 철근, 철재 울타리, 출입문, 조명탑 등

- 기타 : 분뇨 저장소 용량 등

② 건축물별 구분

- 주 건 물 : 종합운동장, 야구장, 체육회관 등

- 부속건물 : 창고 등 기타 부속건물

③ 성상별 구분

- 폐콘크리트

- 폐아스팔트 콘크리트

- 건설폐재류

- 건설오니

- 혼합건설폐기물

- 폐슬레이트, 텍스 등 석면함유 건축자재(지정폐기물)

- 기타 폐기물

2) 기  타 : 본 과업에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의 후 시행한다.

나. 실시설계

1) 일반사항 : 현지조사에서 검토 확인된 사항을 근거로 현지 여건에 맞추어 실시설계하고 설계기준이 부적정할 경우에는 발주기관과 협의 후 시행한다.

2) 설계기준

① 철거대상 : 물건별 시행

② 철거수량 : 물건별 산정을 원칙으로 작성

③ 적용기준 : 건설관련 규정 및 관련법규를 적용하고 건설표준품셈에 의하여 비용 산출

다. 적용시방서 및 관련규정

◦ 본 과업수행은 다음 규정에 따라야 하며, 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다

1) 환경관련 법규 및 규정

2) 건설일반 표준시방서

3) 기타 환경부 및 건설교통부가 제정하는 법령 및 관련 시방서

라. 각종 기준의 작성

◦ 적용기준 및 단가 수량산출 기준 작성

마. 산출서 및 계산서의 작성

1) 철거 및 폐기물 물량 산출은 도면화한 산출근거로 작성하여야 한다.

2) 산출서 및 계산서 작성 시 물건별 조사를 참조하여 각각 구조물별, 건축물별, 성상별로 구분하여 작성한다.

3) 단가산출서는 건설공사 표준품셈, 물가정보 등을 참고하여 작성한다.

4) 고재류는 누락사항이 발생되지 않도록 상세히 작성하여야 한다.

바. 공사 예정공정표 작성

1) 지장물 철거공사와 폐기물 처리공사가 연속적으로 추진될 수 있도록 예정공정표를 작성하여야 한다.

2) 지장물 철거시기에 따라 단계별로 예정공정표를 작성하며, 철거시기는 발주기관에서 정하는 바에 따라 작성한다.

사. 철거 대상지내 쓰레기 투기 방지 시설 설계

◦ 철거 대상지내 본 과업이외의 추가 폐기물량이 발생하지 않도록 쓰레기 투기 방지 시설에 대하여 설계하여야 한다.

3. 종합보고서 작성

가. 종합보고서의 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 보고서 이여야 하며, 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

1) 과업의 목적

2) 과업의 범위

3) 과업의 내용

4) 지장물 철거 공법 비교 검토(안)

5) 지장물 철거 공종별 세부설계 내용 (공종별 비교검토 내역 포함)

6) 지장물 철거 비용 산정 내역

7) 폐기물처리 비용 산정 내역 (폐기물은 구조별, 건축물별, 성상별 구분하여 작성)

8) 공사 예정공정표(단계별 예정 공정표 포함)

9) 철거 대상지내 쓰레기 투기 방지 시설 설계

10) 기타 필요 사항

나. 종합 보고서는 실시설계 용역에 대한 모든 내용이 수록되어야 한다.

다. 발주기관이 요구하는 기타 필요 사항은 발주기관과 협의하여 작성한다.

4. 설계서 작성

가. 설계서 양식 및 규격은 최종 발주기관과 협의하여야 한다.

나. 설계서는 지장물 철거공사와 폐기물 처리공사로 구분하여 작성한다.

다. 설계서 항목은 총괄내역서, 원가계산서, 예산내역서, 수량산출근거, 단가산출서, 일위대가 순으로 구분하여 작성한다.

라. 재료산출 및 단가산출은 공종별로 산출하고 단가를 계상한다.

마. 당해연도 건설공사 표준품셈에 준하되 품셈에 기준 없는 경우 실사를 통한 품을 적용한다.

바. 일반관리비 비율 등은 재정경제부 제정 예산회계법 시행령 기준에 따른다.

사. 산재보험료 및 안전관리비는 노동부에서 고시하는 기준에 따른다.

아. 재료비는 정부 구매물가 단가를 적용하고, 정부 구매단가가 지정되지 않은 재료에 대하여는 적용근거를 명시하여야 한다.

5. 일반 및 특별시방서 작성

가. 일반 및 특별시방서는 지장물 철거공사와 폐기물 처리공사로 구분하여 작성한다.

나. 일반시방서는 공사에 필요한 일반적인 제반사항이 작성되어야 한다.

다. 특별시방서는 일반시방서에 제외된 공종별 사항에 대하여 작성하여야 한다.

라. 본 공사에 사용하는 특수공법 및 자재에 대한 시방을 알기 쉽게 상세히 기록 하여야 하며, 필요하면 관련근거를 명시하여야 한다.

마. 기타 수록해야 할 사항은 발주기관과 협의하여 작성한다.

6. 관련 도면 작성

1) 일반사항

① 설계도면은 CAD를 활용하여 작업함을 원칙으로 한다.

② 도면상의 표기는 정부의 토목제도 통칙과 공문서 작성기준을 참조하여 이해하기 쉽게 작성한다.

2) 도면 작성

① 철거대상 물건의 배치도는 지적도를 기준으로 하여 표시하고 현황 및 대상을 상세히 수록한다.

② 산출근거 작성을 위한 지장물의 평면도, 단면도 및 입면도, 사업대상지 종․횡단면도를 작성하여야 한다.

③ 발파해체공법 적용 시 발파 천공장약 상세도, 방호상세도 등 발파해체 관련 도면을 상세히 작성한다.

④ 철거대상도에 기록해야 할 사항은 발주기관과 협의 후 결정한다.

⑤ 철거대상도에 사용되는 도면, 문자, 부호는 상세히 표기해야 하며 필요한 경우 별도의 상세도를 작성한다.

3) 기타 도면작성

◦ 본 과업내용서에 명시된 내용을 상세히 나타내고 과업내용서에 명시되지 않은 내용일지라도 발주기관의 요구가 있을 시 이에 따라야 한다.

제4장 성과품

1. 일반사항

가. 성과품의 내용, 순서, 편집방법 등은 발주기관과 사전 협의후 작성한다.

나. 성과품으로 제출하는 CD-ROM에는 종합보고서, 설계서, 일반 및 특기시방서, 관련도면과 본 과업상 작성된 각종 검토 및 보고 등의 일체의 사항이 수록되어야 한다.

2. 성과품 목록

성과품명		수 량	규 격	비 고
종합보고서		10부	A4
설계서	지장물 철거	10부	A4
	폐기물 처리	10부	A4
일반 및 특기시방서	지장물 철거	10부	A4
	폐기물 처리	10부	A4
관련 도면		10부	A3	Autocad 파일로 작성
CD-ROM		2 set		성과품 일체 기록

붙임 1)

착    수    계

용  역  명 :

계  약  액 :

계약연월일 :

착수연월일 :

완 료 기 한 :

상기와 같이 착수하였기에 착수보고서를 제출합니다.

첨   부 : 1. 예정공정표(별도양식 없음)

2. 분야별 용역수행자 명단

20   년    월    일

주    소 :

회 사 명 :

대표성명 :                   (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

붙임 2)

분야별 용역수행자 명단

착수일 :

완료일 :

분 야	직책	자격종목 및 등록번호	주민등록번호	회사내 직위	성명	서명	용역과업 수행내용	참여 기간

붙임 3)

보  안  각  서

(수행회사용)

본인은 20  년  월  일 귀 공사와 계약체결한 『숭의운동장 도시개발사업 지장물 철거 및 폐기물 처리공사 실시설계 용역』을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임을 물론 용역수행 전에 용역 참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부적당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20   년    월    일

소  속 :

직  위 :

성  명 :             (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

붙임 4)

보  안  각  서

(용역 참여자용)

본인은 20  년  월  일 귀 공사와 계약체결한 『숭의운동장 도시개발사업 지장물 철거 및 폐기물 처리공사 실시설계 용역』을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20   년    월    일

소  속 :

직  위 :

성  명 :             (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

붙임 5)

주간 공정보고

� 용 역 명 :

� 용역기간 :

� 용역진행사항

구 분	추진실적 ( . . ~ . . )	추진계획 ( . . ~ . . )	비 고 (공정율, %)
업무내용	- 인원투입현황 - 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 분야별 참여 기술자 및 세부과업별 구분 작성		실시공정/ 예정공정
특기사항	문제점 및 대안 등

대 표 자 :            (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

붙임 6)

사업대상지 위치도