- 송도 웰카운티 지하매설물 변위점검 용역 -

과 업 내 용 서

2008. 4

목     차

Ⅰ. 과업개요	2

Ⅱ. 일반사항	3

Ⅲ. 세부과업내용	8

Ⅳ. 성과품 제출	11

Ⅴ. 관련서식	13

Ⅰ		과업개요

1. 과업의 명칭

○ 송도 웰카운티 지하매설물 변위점검 용역

2. 과업의 목적

○ 송도 웰카운티 지하매설물 변위점검 용역을 시행하여 아파트 단지에 대한 입주민 우려 불식

○ 연접구간에서 시행중인 도시철도 공사의 송도 웰카운티 단지내 영향 여부를 확인, 안정성을 검증코자 용역 시행

3. 과업의 기본방향

○ 송도웰카운티 지하매설물의 이상유무 점검

○ 송도웰카운티 단지 안정성 검증

4. 과업의 개요

가. 공간적 범위 : 송도 웰카운티 1단지

나. 시간적 범위 : 2008년 4월 ~ 지하철 공사구간 완충녹지 완성후

다. 내용적 범위

○ 지하매설물 변위점검

○ 연접공사구간 영향검토

5. 과업의 기간 등

○ 착수일로부터 12개월

(단, 완충녹지 사면완성에 시기에 따른 과업기간 증․감 조치)

Ⅱ		일반사항

1. 적용범위

○ 모든 과업은 이 과업지시서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 발주처의 제규정 및 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 감독원과 협의하여 수행해야 한다.

2. 법규 우선준수

○ 수급인은 이 과업지시서 내용이 관련법규와 상호 모순될 경우(과업수행 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

3 . 용어의 정의

가. 발주자

『발주자』이라 함은 해당용역의 시행주체인『인천도시개발공사』를  나타내며 수급인에 대한 계약당사자를 말하며,『건설기술관리법 제2   조 제5호』의『발주청』을 말한다.

나. 수급인

『수급인』이라 함은『기술용역계약 일반조건 제2조 제2호』의『계    약상대자』를 말한다.

다. 감독원

『감독원』이라 함은 수급인이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘·감독할 수 있는 자로써 인천도시개발공사가 임명·통보한 직원을 말한다.

4. 용어해석의 우선순위

○ 이 과업지시서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 그에 명시된  용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

(1) 계약문서(이 과업지시서를 포함한다.)

(2) 건설기술관리법, 동 시행령 및 동 시행규칙

(3) 기타관련 법규

(4) 종류별 용어사전

○ 과업지시서 내용해석에 차이가 있을 경우에는 우리공사의 의견에 따라야 한다.

5. 용역착수

○ 수급인은 계약체결 후 착수서류 1식(착수계, 과업수행계획서, 용역수행자 명단 및 이력서, 조직표, 보안각서 등 - 별첨양식 참고)과 과업수행계획서를 계약체결일부터 7일 이내에 제출하고, 현장조사를 바로 실시한다.

6. 과업수행기간 변경(중지요청 등)

(1) 상위계획의 변경 등으로 과업기간 내 과업준공이 어렵다고 판단될 때

(2) 수급인의 귀책사유가 아닌 인⋅허가에 따른 관계기관의 협의지연, 심의 신청기간 소요 등으로 인하여 용역과업추진이 불가능하다고 판단될 때

(3) 천재지변으로 과업수행이 불가능할 경우

(4) 기타 우리공사가 필요하다고 판단할 때

7. 용역변경 조건

(1) 계획 변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

(2) 위 (1)사항 이외에 본 용역기간 중에 별도 계획이 필요하거나, 추가 과업이 필요한 경우 감독관과 사전협의하여 결정한다.

(3) 위 각호의 사유로 과업 변경요인이 발생할 시 또는 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당금액을 조정한다.

(4) 직접경비의 실비정산의 경우

(5) 본 용역은 계획변경으로 인해 과업을 더 이상 진행할 수 없을 경우 타절준공 할 수 있다.

(6) 기타 발주자가 필요하다고 인정할 경우

8. 공정보고

가. 주간 공정 보고

(1) 과업추진 실적 및 다음주 과업 수행계획을 1주일 단위로 제출

나. 월간 공정 보고

○ “수급인”은 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음 달 05일까지 분야별 용역감독원을 경유하여 서면으로 보고하여야 한다.

(1) 과업추진내용 및 공정 현황

(2) 각종 업무협의 및 문서수발 현황

(3) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

(4) 참여기술자 현황

(5) 다음 달 과업수행 계획

다. 중간보고

(1) 주요 단계별 과업 종료 시

(2) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

(3) “발주자”가 용역 수행 상 필요하여 요구 시

라. 용역준공 전 최종보고

(1) “수급인”은 용역준공 30일전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역준공 전 최종보고를 사업 총괄 책임자가 직접 보고하여야 한다.

(2) 용역준공 전, 최종보고회 개최와 최종보고서 제출 전에 “발주자”의 사전 검토를 받아야 한다.

9. 추가 과업

(1) 본 과업 지시서상에 명기되지 않은 사항이라도 용역 수행 상 당연히 필요하다고 인정되거나 관련 법규에 규제되는 주요사항 등은 감독관과 협의하여 결정하고 필요한 서류를 작성․제출하여야 하며 “을”의 부담으로 수행하여야 한다.

(2) “수급인”은 본 용역의 진행 중 또는 완료 후 관계기관 협의에 필요한 자료가 발생할 경우 이를 작성 제출하여야 한다.

(3) “수급인”은 본 용역의 완료 후에도 용역내용과 관련되어 재검토, 보완요청이 있을 때에는 그 요청이 통상 용역 수행 상 당연히 이행되어야 할 사항인 경우에는 별도의 용역비용 청구 없이 재검토․보완하여 제출하여야 한다.

(4) “발주자”의 승인을 받은 사항이라도 추후 계획 또는 과업서상의 잘못이 발견될 시는 추가 용역비용 청구 없이 계약자 책임 하에 수정․보완하여 제출하여야 한다.

10. 수급인의 의무 및 책임

(1) 수급인은 본 용역을 수행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라 공익이 우선되도록 업무를 수행하여야 함.

(2) 수급인은 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 그 내용이 미비하거나 과오, 오류 등으로 인하여 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것이 아니며 수급인은 용역의 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주자의 수정, 보완요구 등이 있을 때에는 수급인의 부담으로 시정조치 하여야 함.

11. 보안대책

(1) 수급인은 보안대책을 수립 시행하여야 하며, 보안각서는 수급인의 책임 하에 작성하여 착수계와 함께 서면으로 제출하여야 한다.

(2) 과업수행 참여자가 교체될 시에는 인계·인수를 철저히 하고 감독원의 확인을 받아야 한다.

(3) 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

(4) 기타 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 수급인이 진다.

(5) 수급인은 용역수행과정에서 수집된 기록, 자료 및 용역결과 중 대외적 보안이 필요한 자료는 시건장치가 있는 보관함에 보관하고 관리하여야 한다.

(6) 수급인은 본 용역수행 중 타 기관 또는 타 업체로부터 자료 협조요청을 받았을 때에는 감독원에게 보고하고 협의하여 타 기관에 협조하여야 한다.

(7) 수급인은 보안 및 안전에 대한 일체의 책임을 져야 하며 특히 현장조사 등에 따른 안전사고 예방에 만전을 기하여 하며 안전사고 발생시 계약자가 일체의 책임을 져야 한다.

12. 위반행위에 대한 조치

발주자는 다음 사항의 경우에 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관련 규정에 의거 조치할 수 있다.

(1) 제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 않을 경우

(2) 계약기간 내에 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

(3) 용역수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 중대한 과실이 인정될 때

(4) 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

(5) 계약자 임의로 참여자를 교체하였을 때

13. 기타사항

(1) 각종 보고서 작성 시 본 과업수행을 위해 참여하였던 기술진 및 용역관련 직원의 명단을 수록하고 제출문에는 현장대리인 및 부문별 책임기술자가 날인하여야 하며 참여기술진의 부문별 참여사항(내용, 기간 등)을 수록하여야 한다.

(2) 본 과업지시서에 명기 되지 않은 사항이라도 용역 수행상 필요하다고 인정되는 사항에 대하여는 경미한 사항이라 할지라도 감독관과 협의하여 결정한다.

Ⅲ		세부과업내용

1. 지하매설물 변위점검

가. 과업내용

ꊱ 시행방법 : CCTV 조사

ꊲ 과업범위

□ 송도 웰카운티 1단지 도시철도공사 연접구간

- 우수관로 D450mm : 318m

- 오수관로 D300mm : 351m

ꊳ 시행시기 : 2회

□ 1회 - 계약 후 30일 이내

2회 - 완충녹지 사면안정 후

ꊴ 결과물 제출

- CCTV촬영은 2회 걸쳐 나누어 시행하되, 1회 용역 결과물(cctv촬영            보고서, video tape)은 촬영완료 후 착수후 30일 이내 우선적으로             제출한다.

나. 과업수행지침

① CCTV촬영전 CCTV 촬영계획을 수립, 감독원의 승인을 득하여          야 하며, 촬영계획대로 시행될 수 있도록 하여야 한다.

② CCTV 촬영 시행결과를 보고하되, 종료시 관로조사 보고서를       작성, 제출하여야 한다.

③ 보고서 작성시에는 아래사항을 포함하여 하수도 시공관리지침의      보고서 작성기준에 의거 작성하여야 한다.

- 관로 이음상태

- 관로 누수상태

- 관 파손상태

- 관로침하 및 구배상태

- 연결관 돌출상태

- 시공된 관로의 품질상태

- 테이프에 포함될 내용 : 촬영대상 관경, 관로 및 맨홀번호, 촬       영현장

④ 당일 촬영한 필름에 대하여 촬영 종료후 반드시 감독원에게 제    출하여야 하며 보고서 작성등을 위한 화면재생이 필요한 경우      감독원에게 필름을 대여받아 시행하되, 반드시 감독원 입회하에    화면을 재생하여야 한다.

⑤ CCTV 촬영과오나 준비미비, 고의적 조사누락등으로 인해 문      제가 발생되지 않도록 철저히 조사하여야 한다.

2. 송도웰카운티 단지 안정성 검증

가. 과업내용

ꊱ 시행방법 : 계측

ꊲ 과업범위

□ 송도 웰카운티 1단지 도시철도공사 연접 사면 변위 계측

- 지중변위계 : 3개소

- 지하수위계 : 1개소

ꊳ 과업기간 : 계약일 ~ 완충녹지 사면안정 후 (12개월)

※ 과업기간은 발주처 요구에 따라 증․감 가능.

ꊴ 계측빈도

- 계측관리는 주2회 정기적으로 실시 (비상주 원칙)

- 계측기별 중요도 및 발주처 요구에 따라 계측빈도를 조절할 수 있음.

- 책임기술자가  월1회 현장 방문하여 안정성 확인 및 검토 시행

ꊵ 성과분석 및 보고서 작성

- 공사 착공전 계측계획서를 제출하여야 한다.

- 매주 1회 주간보고서를 제출하도록 한다.

- 계측수행 완료후 15일 이내에 최종보고서를 작성▪제출하여야 한다.

나. 과업수행지침

① 수급자는 계측업무를 수행하기 위한 자격을 가진 중급기술자 이         상을 발주자의 승인하에 투입하여 업무수행에 차질이 없도록 한다.

② 책임기술자가 전반적인 안정성 확인 및 검토를 실시하고 토질          및 기초기술사의 확인을 받아야 한다.

③ 견적서 제출전 반드시 현장여건을 상세 숙지하여야 하며, 이의          미이행으로 인해 추가되는 비용은 수급자의 부담으로 한다.

④ 수급자는 현저히 큰 변위가 발생하는 경우 또는 현장 여건상           긴급한 조치가 필요할 경우에는 수시 보고하여 대응할 수 있도         록 한다.

⑤ 모든 계측센서 및 계측기기는 검교정성적서(Calibration Sheet)          를 확인하여 시공한다.

⑥ 모든 계측기는 설치완료후 초기값을 설정한다.

⑦ 계측기 및 케이블의 손, 망실을 방지하기 위한 보호장치를 강구         하여야 하며, 특별한 과오가 없는 정상적인 건설과정에서 발생한         손, 망실에 대해서는 보호미흡으로 간주되므로 수급자 부담으로         재설치등 모든 책임을 진다.

⑧ 계측Data 입력완료 후 특이사항 발견시 즉시 책임기술자가              전반적인 안정성확인 및 검토를 실시하여 조치방안을 제시하여야          한다.

Ⅳ		성과품작성

1. 제출기준

(1) 성과품의 작성은 그 내용, 순서, 편집방법 등을 감독원과 사전 협의하여야 하며, 원고 및 원도를 작성하여 감독원의 검사를 받은 후 인쇄하여야 한다

(2) 성과품 작성수량은 아래 수량을 원칙으로 하되, 감독원 필요 요청 시 추가하여 납품하고, 각종 성과품은 인쇄물 및 전산화 (□글, Auto-CAD,  MS-office, Photo-shop 등)하여 제출하여야 한다.

(3) 용역 수행으로 발생한 각종 조사자료 및 도면 등 일체의 성과품은 “발주자”의 소유로 하고 “발주자”의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 용역 목적 이외에 사용할 수 없으며 용역 완료시 “발주자”에게 모두 제출하여야 한다.

(4) 용역 수행으로 생산된 성과품의 저작권은 “발주자”의 소유로 하며 “수급인”은 향후 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

(5) 제3자의 권리대상으로 되어 있는 특허권, 저작권 등을 사용했을 때에는 “수급인”은 일체의  책임을 져야 한다.

2. 성과품

성과품명	수 량 (부)	규 격	편 철	비 고
1. 착수 보고서	5	A4	좌철
2. cctv촬영 보고서 (1회)	5	A4	좌철
3. cctv촬영 보고서 (2회)	5	A4	좌철
4. 주간 보고서	5	A4	좌철
5. 월간 보고서	5	A4	좌철
6. 최종 보고서	10	A4	좌철	CCTV+계측 <요약보고서 포함>
7. 기초조사 자료	1식			각종 자료
8. 전산자료 (CD-ROM파일,Video Tape)	1식			보고서 등
9. 기타 발주자가 필요로 하다고 인정하는 자료

착    수    계

용  역  명 :

계  약  액 :

계약연월일 :

착수연월일 :

완 료 기 한 :

상기와 같이 착수하였기에 착수보고서를 제출합니다.

첨   부 : 1. 예정일정표(별도양식 없음)

2. 참여기술자 조직표(별도양식 없음)

20   년    월    일

주    소 :

회 사 명 :

대표성명 :                   (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

분야별 용역수행자 명단

착수일 :

완료일 :

분 야	직책	자격종목 및 등록번호	주민등록번호	회사내 직위	성명	서명	용역과업 수행내용	참여 기간

보  안  각  서

(수행회사용)

본인은 20  년  월  일 귀 공사와 계약체결한 『송도 웰카운티 지하매설물 변위점검 용역』을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임을 물론 용역수행 전에 용역 참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부적당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20   년    월    일

소  속 :

직  위 :

성  명 :             (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

보  안  각  서

(참여자용)

본인은 20  년   월   일 귀 공사와 계약체결한 『송도 웰카운티 지하매설물 변위점검 용역』을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

분야	직위	성명	서명	분야	직위	성명	서명

20   년    월    일

소  속 :

직  위 :

성  명 :             (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

주간 공정보고

� 용 역 명 :

� 용역개요 :

◦용역기간 : 2008년  월  일 ～ 2008년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

� 용역진행사항

구 분	금주 진행사항(200 . .)	다음주 예정사항(200 . .)	비고(공정율)
업무내용	- 인원투입현황 - 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 분야별 참여 기술자 및 세부과업별 구분 작성		실시공정/ 예정공정(%)
특기사항	문제점 및 대안 등

주    소 :

기 술 자 :

대 표 자 :

총괄기술자 :           (인)

인천광역시도시개발공사 사장 귀하

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 용 역

- 월간공정 보고서 (○월) -

2008. ○.

(주) ○  ○  ○

1. 과업진척도 현황(공정표 기준)                      - 예시 -

전체 공정중 13.3% (기간내 공정목표의 62.1% 달성)

구 분	계 획	실 적	대 비
금 회	9.3	4.3	46.2%
누 계	21.4	13.3	62.1%

※ 월간공정표 : 별첨  (공정표에도 도장 또는 사인)

현장대리인 : ○○○ (인)

(도장 또는 사인)

2. 과업수행내용

구 분	금월실적(2005.9)	차월계획(2005.10)
누계공정 (계획/실적)	21.4 / 13.3	25.0 / -
내 용	○ -	○ -
비 고 (특이사항)	○	○

3. 세부내용 : (별첨참고)

※ 한달간 작성한 내용을 수록하여 제본 또는 제철하여 제출

(별책으로 제출 가능)

- 사이즈 : 보고서 A4, 도면은 최대 A3

- 가능한한 도면은 칼라 제출

- 제출부수 : 2부