시 방 서

1. 과업의 수행범위

가. 계측기 설치 및 측정

나. CCTV촬영

다. 제반 보고서 작성

라. 기타 본 과업의 효율적 수행을 위하여 감독원이 지시하는 사항

2. 과업의 착수

가. 수급인은 계약체결후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며 착수보고서를 제출하여 우리공사 승인을 받아야 한다.

나. 착수보고서에는 과업수행 인력 및 구성, 과업수행 인력의 상주 및 비상주여부, 지반조사, 계측 및 분석계획, 공정          계획등 본 과업 전반에 세부추진 계획서가 포함되어야 한다.

3. 과업수행자의 구성 및 자격기준

가. 사업책임기술자는 토질 및 기초분야의 특급기술자로서 계측에 관한 조사, 시험, 설계 및 침하안정관리 분야에서

고도의 지식과 경험을 가진 자 이어야 한다.

나. 분석 및 전산처리 책임기술자는 고급기술자 이상의 자격을 보유한자로서 지반계측 분야의   풍부한 지식과 경험         을 가진 자 이어야 한다.

4. 과업수행자의 근무지침

가. 사업책임기술자는 과업을 총괄하여 수행하여야 하며, 현장에 비상주 한다.

나. 보조기술자는 본 용역의  진행에 따른 업무량에 따라 본 용역을 원활하게 수행하는데 지장이 없도록 필요한 인          력을 감독원과 협의하여 현장을 관리하여야 한다.

5. 과업수행자의 책임과 의무

가. 과업수행자는 계측설계중 이상징후가 발견될 경우  이에 대한 문제점과 대책을 사전에 우리공사에 제시하여야          한다.

나. 착수보고시 제출된 과업수행 인력을 교체하고자 할 때에는 동등 또는 그 이상의 능력을 가진 자를 우리공사의           사전 승인을 얻어 배치하여야 하며, 선․후임을 15일이상 중복근무토록 하여 과업수행에 지장이 없도록 하여야          한다.

다. 과업수행자는 감독원이 요구하는 기술적 사항에 대하여 검토후 의견을 제시하고, 지시된 사항의 이행현황 및 실          적을 보고하여야 한다.

6. 보안사항

가. 계약사의 대표자는 별첨양식에 의거 보안각서를 제출하고 과업수행자에 대한 보안각서는 계약 대표자의 책임하          에 징구 제출하여야 한다.

나. 월간 및 최종보고서등 용역 성과물은 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 필요할 경우 비밀 또는 대외비로          분류 관리하여야 한다.

다. 모든 성과품은 수급인이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부로 유출할 수 없다.

라. 수급인은 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 져야           한다.

7. 보고사항

가. 과업수행자가 발주자에게 제출하여야 할 보고 사항

1) 착수보고서 : 5부

- 과업수행 인원의 배치계획

- 근무일정계획

- 변위계측  세부추진 계획서

2) 주간보고서 : 5부

- 개별작업의 설명을 포함한 공정현황

- 주간 업무의 주요사항

3) 월간보고서 : 5부

- 개별작업의 설명을 포함한 공정현황

- 월간 업무의 주요사항

4) 수시보고서 : 5부

- 발주자로부터 별도 보고의 지시가 있는 경우

- 천재지변 등의 사고로 용역이 중단된 경우

- 용역이 예정된 용역일정을 비해 현저히 부진되고 있는 경우

- 실시공정에 이상현상이 발생할 경우

- 지반거동에 이상현상이 발생할 경우

- 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 경우

5) 확인단계 보고서, 최종 종합보고서 : 각 10부

- 월간 및 연도말 보고 내용

- 계측결과 분석내용 및 재해석 결과

- 기타 필요한 사항

7) 사진첩 : 2부

8) 용역수행 비디오 Tape : 1식

9) cctv촬영보고서(1,2차) : 각 5부

나. 보고절차

1) 제반 보고서류는 반드시 감독원을 경유하여야 한다.

8. 설계변경

가. 과업량, 과업내용, 과업수행기간 등 과업범위가 변경될때

나. 계측자재 수량 정산

다. 계측물량 및 분석물량의 증감에 따른 정산이 필요할때

라. 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

9. 기타사항

가. 본 과업지시 이외의 사항은 관계 법령 및 우리공사의 관련규정과 정부제정 각종 시방서에 의거 감독원과 협의하          여 수행하여야 한다.