과 업 지 시 서

영종하늘도시 조성사업 지구내 편입되는 무연분묘를 이장함에 있어 이장업자는 장사등에 관한 법률 등 관계법령과 과업지시서의 내용을 충분히 숙지하여 엄숙하고 경건한 마음으로 법적 절차 및 감독자의 지시에 따라 본 무연분묘 이장용역 업무를 시행하여야 한다.

1. 과업명 : 영종하늘도시 조성사업 무연분묘 이장용역

2. 이장대상 분묘수 : 480기

구분	운남동	비고
1차 개장허가	211	‘08.6 용역착수
2차 개장허가	269	‘08.7 이후 용역착수

* 무연분묘 기수는 현장여건 등에 따라 증감될 수 있음

3. 위치 : 인천광역시 중구 운남동 일원

4. 이장방법 : 화장 후 납골당 안치(인천가족공원)

5. 과업기간 : 착수일로부터 90일(단, 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있음)

6. 과업수행내용

일반준수 사항

(1) 합동제례

가. 영령들을 위로하기 위해 분묘이장 전에 합동으로 개토제를 지낸다.

나. 분묘개장 후 안치장에서 합동 위령제를 지낸다.

(2) 도면작성(현황도) 및 사진촬영 : 착공 전에 이장해야할 분묘기수를 재확인하여         1200분의 1 현황도(기존 분묘 표시번호 사용)를 작성하고 개장구역 전 지역을        연결촬영 및 납골당 안치배치도를 작성하여 후일 연고자가 나타났을 때 확인할        수 있도록 작성 제출한다.

(3) 작업계획서 제출

가. 공사착공 전에 예정공정표, 인력동원계획서, 장비동원계획서를 작성

제출하여야 한다.

나. 개장작업 착수 하루 전에 익일 작업계획서를 작성해 제출하고 승인을

받아 업무를 시행하여야 한다.

다. 무연분묘 일제 개화장에 따른 민원발생 및 사업에 차질이 발생하지 않도록

하기 위하여 인천시시설관리공단 장묘문화센터와 사전협의하여야 한다.

(4) 안치소 및 안내판 설치 : 착공과 동시에 감독관의 지시에 따라 작업을

착수하되 작업장소에는 “무연분묘 이장 안내문(첨부1)” 및 10평 이상의 임시

유골안치소(천막가설도 가함)를 설치하여야 한다.

(5) 안전관리 : 안전관리책임자를 임명 배치해 모든 사고위험을 방지하도록 하며,

위험장소에는 위험표지판을 설치 안전을 기하여야 한다.

(6) 작업시간은 감독관 입회하에 일출 후부터 오후 5시까지로 하며, 주말(토요일, 일       요일)에는 작업을 하지 않는다.

(7) 발굴하는 분묘별로 “묘적부(첨부2)”를 각2부씩 작성하여 준공계 제출시 동시

제출한다.

(8) 묘적부에는 봉분의 형태, 비석, 상석 및 식별을 위한 표식 등의 유무, 수목 등의       식재여부 등을 반드시 기재한다.

(9) 이장, 화장, 납골당 안치 등 일련의 과정에서 유골이 분실되거나 바뀌지 않도록        특별히 주의하여야 하며 유골관에는 “인식표(첨부3)”를 부착한다

(10) 사진촬영은 분묘별로는 1기당 5분판(5*7사이즈) (①봉분상태 ②이장후 유골상태        ③화장전 관안치상태 ④화장후 납골함 안치상태 ⑤ 납골당 안치상태)에 거쳐 촬        영하며, 일괄로 개토제, 위령제장면, 이장작업장면, 납골당 안치장면을 촬영하여        제출한다.

분묘의 이장

(1) 유골취급 : 유골의 취급은 가장 엄숙하고 정중하게 취급하여야 하며, 특히 이장

질서를 문란하게 하여 연고자 및 주위사람들에게 불쾌감을 유발시켜서는 안 된        다.

(2) 이장작업

가. 이장 전 봉분을 벌초하여 사전에 봉분의 형태가 정확하도록 한다.

나. 분묘의 발굴은 가급적 순번으로 하되 유골(사체) 또는 부장품이 손상되지 않           도록 주의하여야 하며 유품 및 증거가 될 만한 부장품은 추가로 사진촬영을           하고 “묘적부”(첨부2) 특기란에 반드시 기재한다.

다. 발굴한 사체 및 유골(소골)은 백지로 청결히 포장하여 입관한 뒤 화장장으로

옮길 때까지 안전관리책임자가 배치된 임시안치소에 보관, 관리한다.

라. 발굴 의뢰한 분묘 이외의 분묘가 발견되거나 유골이 발견될 경우에는 감독관

에게 보고하고 감독관의 지시에 의하여 처리한다.

마. 유골이 없는 분묘의 처리 : 봉분 밑단에서 2m이상, 봉분 가장자리기준 반경           1m이상 발굴하여도 유골이 없이 소골 되었을 때에는 시체가 있었던 곳의 1           ㎏ 이상 흙을 취토, 염(포장)하여 입관 하여야 한다.

바. 이장과정에서 합장 또는 3합장이상의 분묘가 발견된 때에는 감독관에게 보고

하고 사진촬영한 뒤 별도의 관에 입관하고 기존 분묘번호을 원번으로 하여

부번호를 부여 구분관리 하여야 한다.(예, 기존분묘번호 - 가, - 나)

사. 개별분묘의 이장작업 완료 후 분묘별로  봉분 밑단과 수평으로 복토처리를            하여야 하며, 분묘에서 나온 칠성판 등은 반출을 금하며 일정 장소에 모아

소각처리 한다.

(3) 자재사용

가. 본 용역용 자재는 과업지시서에서 정한 규격 및 품질 이상의 제품을 책임하           에 구입하되 감독관의 사전승인을 받아 사용한다.

나. 대․소인을 불구하고 육탈되지 아니한 것은 시체로 보고 “대”을 사용하고

육탈되어 백골만 남은 것은 유골로 보고 관은 “소”를 사용한다.

- 관의 종류 및 규격

관종류 및 크기	가로(cm)	세로(cm)	길이(cm)	두께(cm)
대	40	30	180	1.5
소	30	20	60	1.5

다. 납골함은 목재(오동나무등)로 제작하고 규격은 ‘폭16㎝, 높이16㎝,  길이

16㎝, 두께 1㎝이상’으로 한다.

라. 납골함을 제작함에 있어 표면을 깨끗하게 대패질하여 유골에 이상이 발생하           지 않도록 한다.

마. 합장 또는 3합장 이상의 유골은 “가”,“나”,“다”항에 의거 각각 입관                   및 납골한다.

운반

(1) 사체 및 유골 운반은 정중하고 엄숙하게 취급하여야 하며 운반시 요동으로 인한

시체와 유골이 파손되지 않도록 하며, 화장장 및 납골당 운반시 장거리 운반에

따른 안전사고에 특히 유의하여 운반하여야 한다.

(2) 운반은 장의차로 운반하여야 하며, 불가피한 경우 감독관의 승인을 받아 반드시

복개된 차량으로 할 수 있다.

(3) 관을 포개어 운반하는 사례가 없도록 하고 묘번 순서대로 상차하고 하차는 역순

으로 하여 유골이 손상되거나 바뀌는 일이 없도록 하여야 한다.

화장 및 납골

(1) 운반된 시체 및 유골은 점검을 필하고 관계법에 의거 허가된 화장장에서 묘번

순서대로 화장한다.

(2) 화장장에서 발행하는 화장확인서를 묘적부에 반드시 부착하여야 한다.

(3) 화장 전 입관되어 있는 상태와 화장 후 납골함에 납골된 상태에서 분묘소재지

및 분묘번호가 판별될 수 있도록 각1장씩 촬영하여야 한다.

납골당 안치

(1) 납골함 운반은 정중히 취급하며 파손되지 않도록 주의하여야 한다.

(2) 입찰시 제시된 납골당에 안치될 수 있도록 사전협의 하여야 한다.

(납골당의 시설부족 등으로 타 납골당에 나누어 납골하는 일이 없도록 할 것)

(3) 화장된 유골은 납골함에 묘번 순서대로 봉안(부장품이 있는 경우 함께)하여

납골당에 안치하며 납골증명서(확인서)는 화장장에서 발행하는 화장확인서와

함께 묘적부에 부착하여야 한다.

(4) 납골당에 안치 후 이동을 금하며 부득이 납골함 이전 시 에는 우리공사의 사전

승인 및 이전 후 확인을 받아야 한다.

(5) 납골함(첨부4)에는 사업명, 사업시행자명, 분묘의 소재지, 분묘번호, 납골번호 등

을 표시하여 부착한 후 촬영하여 준공계 제출시 함께 준공검사를 받아야 한다.

기타사항

(1) 분묘발굴현장에서 연고자가 나타나 유골인도를 요청할 때에는 신원을 확인 감독       관의 입회하에 유해 인수인계서를 받은 다음 인도하고 묘적부에 등재한다. 이때       이장비는 수임자에게 지급한다.

(2) 이장시 합장 또는 3합장의 경우 즉시 감독부서의 확인등 필요한 지시를 받고

이에 응하여야 하며 화장 및 납골당 안치를 하여야 한다.

(3) 이장작업 및 공사(용역) 과정에서 이장 예상 분묘수에 증감이 있는 때에는 계약단       가에 의하여 정산 지급한다.

(4) 이장(유골의 발굴) 및 운반시, 화장 및 납골당 안치시 등 이장 작업중 발생하는

일체의 사건 및 사고에 대한 민형사상의 모든 책임은 수임자가 진다.

(5) 이장용역에 따른 화장장 및 납골시설의 사용수수료, 관리 등 부대비용은 용역금액

에 포함되어 있으므로 수임자 부담으로 한다.

(6) 이장된 분묘는 관계법에 의거 10년이상 보존 관리 한다.

(7) 무연분묘 처리후 연고자가 나타날 경우에는 관계직원과 협의하여 조치한다.

(8)  기타 정하지 않은 사항은 “장사 등에 관한 법률” 등 규정을 준수하여 감독관과

사전협의 및 승인 후 업무를 수행하여야 한다.

[첨부1]

무연분묘 이장 안내문

1.개 장 지 : 인천광역시 중구 운남동 일원

(영종하늘도시조성사업 지구 내)

2.이장일시 : 2008년    월    일 ~ 2008년   월     일

3.이장기수 : 약 480 기

4.개 장 자 : 인천광역시도시개발공사

5.이장(개장)업자 :

6.이장사유 : 영종하늘도시 조성사업

위 사항에 대하여 문의사항이 있을 경우에는 인천광역시도시개발공사     영종보상사무소[(032)752-9883~5]로 연락하여 주시기 바랍니다.

[첨부2]

묘 적 부( 영종하늘도시)
분묘소재지		이장장소
이장 전 분묘번호		이장 후 납골번호
이장년월일		분묘형태	단장,합장,삼합장
특기사항
참고사항
[ 사 진 ]

[첨부3]

이장전 분묘소재지	인천광역시 중구 운남동 번지
이장 전 분묘번호
이장 후 납골번호
개 장 일 자	2008년 월 일
개 장 이 유	영종하늘도시 조성사업
사 업 시 행 자	인천광역시도시개발공사 (영종보상사무소)
특기 및 참고사항 :

이장지
이장사유	영종하늘도시조성사업
안치번호		분묘번호
이장일	년 월 일
시행자	인천도시개발공사
납골당

16cm

16cm

16cm

[첨부4]

납 골 함

[첨부5]

표식판 및 위령혼비

형태

규격

1. 표식판

영종하늘도시조성사업

무연분묘 안식처

2. 위령비

위령사(慰靈辭)

편히 쉬는 영혼들이여!

돌보는 자 없어 외로운 넋들이여!

영종하늘도시 조성사업으로 그대들의

보금자리를 여기 이 자리로 옮기노니

비록 이 곳이 그전 보다 못할지라도

새로이 맞이하는 영령들이 낯설지라도

놀라거나 슬퍼하지 말고

같은 하늘 아래의 영혼들이니

서로 의지하며 편안히 영면하기 바라나이다.

2008.  .  .

인천광역시도시개발공사 사장

1. 표식판

- 재질 : 알루미늄

- 규격

가로 : 100cm

세로 : 15cm

-글씨

바탕색 : 짙은회색

글자색 : 검은색

2. 위령비

- 재질 : 화강암

규격

가로 : 70cm

세로 : 100cm

두께 : 10cm