송도4공구 3,4단지 보도육교 설계용역

과  업  지  시  서

2008. 11.

- 목      차 -

Ⅰ.  총  칙 -------------------------------------------    1

1 과 업 명 --------------------------------------------    1

2 과업의 목적 ------------------------------------------    1

3 과업의 개요 ------------------------------------------    1

4 일반사항 --------------------------------------------    2

5 적용기준 및 시방서 -----------------------------------    5

Ⅱ  조사 및 자료수집 ----------------------------------    6

1 조사항목 --------------------------------------------    6

2 조사내용 --------------------------------------------    6

(1) 현지답사 ------------------------------------------    6

(2) 지질 및 토질조사 -----------------------------------    6

(3) 지장물조사 ----------------------------------------    6

(4) 교통시설조사 --------------------------------------    7

(5) 배수시설조사 --------------------------------------    7

(6) 구조물 조사 ---------------------------------------    7

(7) 관련계획자료조사 -----------------------------------    7

Ⅲ.  기 본 구 상 --------------------------------------    7

1 관련계획검토 -----------------------------------------    7

2 교통처리계획 -----------------------------------------    7

3 구조물 형식 및 공법검토 ---------------------------------    7

4 설계기준작성 및 기타 ----------------------------------    9

Ⅳ.  상 세 설 계 --------------------------------------    9

1 설계조건 및 일반사항 -----------------------------------    9

2 디자인 설계 -----------------------------------------    9

3 토공 설계 -------------------------------------------   10

4 구조물 설계 ------------------------------------------   10

(1) 육교설계 ------------------------------------------   10

(2) 부대시설 -------------------------------------------   11

Ⅴ.  성과품작성 및 납품 --------------------------------   11

1 일반사항 --------------------------------------------   11

2 작    성 --------------------------------------------   11

3 납    품 --------------------------------------------   15

Ⅰ.  총  칙

1 과 업 명 : 송도4공구3,4단지 보도육교 설계용역

2 과업의 목적

본 과업은 송도4공구 3,4단지 보행브릿지 연결을 통해 송도4공구 웰카운티 내에서 주민들의 통행 편의를 제공하고자 함.

3 과업의 개요

(1) 과업의 범위 : 보도육교 설계 1식

(보도육교 구조물 및 보도육교에 설치되는 조경, 경관조명, 사인물 등 일체)

(2) 과업의 위치 :  인천광역시 연수구 송도동 9-6, 9-5 (송도4공구 3,4단지)

(3) 과업내용

◦ 보도육교 실시설계도 작성, 시방서 작성, 내역서 작성, 수량산출 및 일위대가 등의 적산작업

◦ 각종 인허가 업무 대행 (교통처리계획, 도로점용허가, 경제자유구역청 경관자문 등)

◦ 각종 심의(자문)도서 작성 및 심의(자문) 대행 (변경심의(자문) 포함)

◦ 설계에 필요한 구조계산, 용량계산 및 부하계산 등의 도서 작성

◦ 보도육교 디자인 (경관자문에 의한 변경시 재디자인)

◦ 종합설계 보고서, 조감도 제작

◦ 계약자 상호간의 업무협의 및 자료제공

◦ 과업기간내에 발생하는 모든 설계변경

◦ 기타 과업지침서 범위내 公社에서 요구하는 업무

(4) 과업기간

◦ 본 과업의 실시설계 기간은 계약일로부터 60일간(공휴일 등 휴지일수 포함)으로 하되, 용역기간은 보도육교공사 완료일까지로 한다.

◦ 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주자의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

② 발주자의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피 하게 될 때

④ 기타 과업과 관련 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

(5) 과업시행지침

◦ 보도육교의 구조 및 디자인 형식은 1,2단지 보도육교(일반형) 안과 동일한 방식으로 하되, 인천경제자유구역청 경관자문 결과에 따라 디자인 변경 사항 발생시 재디자인을 실시한다.

(6) 기성지급방법 및 계약기간

◦ 기성지급방법

- 경관자문 완료시     : 30%

- 실시설계 완료시     : 60%

- 보도육교공사 완료시 : 10%

◦ 계약기간

- 계약일로부터 2009년 4월 30일까지

(단, 보도육교공사 일정에 따라 변경가능)

※ 단, 실시설계는 계약일로부터 60일(경관자문 포함)

(7) 발주자 및 연락처

◦ 발주기관 : 인천광역시도시개발공사

◦ 주    소 : 인천광역시 남동구 만수6동 1090번지

◦ 연 락 처 : 전화 (032) 260-5255, 팩스 (032) 260-5269

4 일반사항

(1) 착수계 및 기타제출 서류

◦ 계약자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

가) 착수보고서

① 사업책임 기술자의 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

② 용역수행계획서 및 예정공정표

③ 내역서

나) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

(토목구조기술사, 토질 및 기초 기술사를 포함하여야 한다)

다) 보안대책 및 보안각서

라) 기타 용역수행에 필요한 사항

(2) 과업수행계획서

◦ 계약자는 계약 후 7일이내 인천도시개발공사 건축계획팀에 과업수행 계획서를 작성하여 제출하여야 하고, 발주자의 승인을 받아야 한다.

(3) 업무협의 및 공정보고

◦ 계약자는 계약 후 7일이내 착수계 제출시 발주자와 1차 업무협의를 한다.

◦ 과업수행계획서 제출후 본과업 추진중에 수시로 업무협의를 한다.

◦ 주 2회 예정공정표를 기준으로 발주처와 업무협의 한다.

(4) 설계용역 손해배상보험(공제)

◦ 보험(공제) 증서 제출 : 계약자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 계약자는 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주자에게 제출하여야 한다.

◦ 보험(공제) 가입기간 : 용역 착수일부터 완료일까지의 기간

(5) 본 과업 수행 중 公社의 사정에 의하여 사업계획 및 설계범위 등의 변경이 있을 시는 公社와 협의 후 과업을 수행하여야 한다.

(6) 본 과업을 수행하는 설계자, 기타 협력업체는 성실히 감독원의 지시에 따라야 하며, 감독원은 불성실 또는 부적당하게 본 과업을 수행하는 설계자, 기타 협력업체에 대해서 교체를 명할 수 있다.

(7) 용역 중 또는 용역완료 후라도 감독원은 필요에 따라 본 과업에 대한 자료의 제출 및 설명을 요구할 수 있으며, 계약자는 이에 따라야 한다.

(8) 설계업무 진행시 중간검사 결과 수정사항에 대하여는 公社의 지시에 따라야 하며, 단계별 기성대가 지급후에도 설계도서에 보완사항이나 하자가 확인될 시에는 공사의 지시에 따라 즉시 수정 완료하여야 한다.

(9) 계약자는 사전에 관련기관과 사전협의를 거치고, 자문 및 협의 사항에 대하여는 公社에 보고 후 방침을 받아 설계에 반영하여야 한다.

(10) 관련기관 인․허가 및 협조

◦ 계약자는 본 과업에 관련하여 다음과 같은 관련기관의 인․허가에 필요한 업무를 공사를 대행하여 이행하여야 하며, 이 과정에서 公社와 긴밀히 협의하여야 한다.

(11) 계약자는 각종 인,허가를 완료할 수 있도록 자료작성, 지자체 협의 등 제반 조치를 취하여야 한다.

(12) 본 과업 수행상 각종 심의, 사업승인 조건 및 기타 사유로 인해 사업계획 및 설계 범위 등의 변경이 있을 시는 公社와 협의 후 과업을 수행하여야 한다.

(13) 설계검토 및 기술자문

◦ 우리公社설계회의(상세설계 완료시) : 세부설계사항, 각종계산 적정여부,  기타 필요사항

(14) 설계에 사용하는 재료

◦ 본 설계용역에 사용하는 각종재료와 제품은 공사 시방서 규정에 적합한 것이어야 하며 특별 재료 또는 제품에 대해서는 발주자와 협의하여 설계에 적용하도록 한다.

(15) 하도급의 범위

◦ 계약자는 본 설계용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없으며 국가를당사자로하는계약에관한법률에 의한 규정을 준수한다.

(16) 발주자 제공자료

◦ 기 시공된 1,2단지 보도육교 실시설계 도서

◦ 본 과업수행을 위해 계약 후 관내 현황 자료 제공 (현재 pile 기초 현황 및 지반조사보고서)

◦ 상기자료는 설계참고용으로 제공된 것으로 계약자는 그 내용의 오류, 정확성을 검토하여 확인 후 사용하여야하며 본 도서를 외부 유출시는 발주자의 허가를 득하여야 한다.

(17) 본 설계지침은 과업수행을 위한 사항을 규정하였으며, 이에 규정되지 아니한 사항은 公社의 관련규정, 정부 관련법령 및 정부제정 각종 시방서에 의거 설계를 수행하여야 한다.

(18) 과업수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환 자료 등 최신기술을 이용토록 한다.

(19) 보다 과학적이고 능률적인 과업수행과 공사의 설계수준 향상을 위하여 가능한 한 전산처리에 의한 결과를 얻도록 하여야 한다.

(20) 설계도서 납품 후라도 설계하자로 인한 부득이한 설계변경 사항 발생시 우리공사의 지시에 따라 즉시 수정 납품하여야 하며, 이로 인한 시공상 하자발생시 변상의 책무를 져야하고, 준공후 라도 일상감사 결과 지적사항에 대해서는 이를 즉시 보완하여 이에 대한 전말보고서를 작성 제출하여야 한다.

(21) 설계과정 상의 주요 검토사항, 특기사항 등은 과업 계획단계, 중간단계 및 종료시 정리하여 제출하여야 한다.

(22) 환경디자인 설계, 경관조명 설계 등 전문분야에 대하여는 허가 받은 업체를 참여토록 하여야 한다.

5 적용기준 및 시방서

◦ 본 설계용역은 다음과 같은 설계기준, 시방서 등에 의거 수행한다.

① 국토해양부 및 토목학회 제정 각종 표준시방서 및 설계지침서

② 도로공사에서 제정한 각종 설계요령, 지침

③ 한국공업규격(KS)

④ 대기환경 보전법, 소음진동규제법, 수질환경보전법

⑤ 건설관리기술법에 의한 품질시험 규정

⑥ 기타 발주자가 제공하는 관련자료 및 설계지침

Ⅱ. 조사 및 자료 수집

1 조사항목

본 과업에 포함된 조사항목은 다음과 같다.

(1) 현지답사

(2) 지질 및 토질조사에 대한 분석

(4) 지장물조사(지하매설물 및 지상매설물)

(5) 교통시설 조사

(6) 배수시설 조사

(7) 구조물 조사

(9) 관련계획 자료조사

(10) 기타 본 과업에 필요한 조사

2 조사내용

(1) 현지답사

◦ 계약자는 현지답사를 통하여 현지조건이 계획시설물에 적합한지를 확인하여야 한다.

◦ 자연현황, 도로교통현황(기존 시설물현황, 기존도로 선형, 교통 특성) 및 주변시설 현황을 상세히 조사하여 설계시 반영하여야 한다.

(2) 지질 및 토질조사

◦ 본 과업 지질 및 토질 해석은 송도4공구3,4단지 지반조사서를 기준으로 설계한다.

(3) 지장물 조사

◦ 계획구간내 각종 지하매설물 및 지상시설물을 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

◦ 지장물중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블 등) 들은 해당 관련기관과 협의하여야 한다.

◦ 공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 관련기관과 협의하여 적절한 보호방안을 고안하여 공사중에 손상이 없도록 한다.

(4) 교통시설 조사

◦ 계획지역 주변 가로망 현황과 교통관련 시설(보도육교, 지하철, 주차장, 버스정류장, 교통신호 등)을 조사한다.

(5) 배수시설 조사

◦ 관계자료 수집 및 현지조사를 통하여 횡단배수, 노면배수, 지하배수 등의 위치, 규격 수위 및 기타 관련 자료를 조사한다.

(6) 구조물 조사

◦ 구조물 조사는 계획 지역에 관련되는 현존 구조물 현황의 조사와 아울러 당해 지역의 자연조건 및 관련 시설물 등을 고려한 구조물의 설치 여부 및 위치를 조사한다.

(7) 관련계획 자료조사

◦ 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 반영하여야 한다.

◦ 계획시설물 구간내의 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련사업 계획을 조사하여 반영하여야 한다.

Ⅲ. 기본 구상

1. 관련계획 검토

◦ 계획지역의 토지이용계획과 기타 관련계획을 검토하여 기본구상에 반영한다.

◦ 기 시공된 1,2단지 보도육교(일반형)를 기준으로 설계하되, 경관자문에 따른 변경시 육교의 구조, 모양, 재료 및 색채 등 미관을 고려 여러 방안을 검토하고 최적의 형태를 결정하도록 구상한다.

2. 교통처리 계획

◦ 조사된 교통시설물 자료를 토대로 시설물 설치공사로 인하여 예상되는 교통영향을 검토한다.

◦ 공사 시행시 우회도로 확보 또는 차량 동선 계획 등을 수립, 관련기관과 협의 한다.

3. 구조물 형식 및 공법검토

(1) 기본사항

◦ 구조설계라 함은 구조물 구조계산서, 구조설계도면, 관련 시방서 등 구조설계도서의 작성 업무를 말한다.

◦ 구조 형식은 기 시공된 1,2단지간 보도육교의 구조 형식을 따른다.

◦ 구조설계자는 설계(부재설계) 단계별 구조계산 및 구조도면 작성 전에 미리 감독원과 협의 후 설계를 진행한다.

※ 3,4단지 기존 구조체 하부의 파일기초 현황을 참조하여 계획하여야 하며, 감독원과 협의하여 결정함. (3,4단지 기초평면도 참조)

(2) 구조계산

◦ 설계기준은 국내법령 및 기준에 적합하게 적용한다. 단, 국내기준에 규정되지 않은 사항은 외국기준을 준용할 수 있으며, 국내기준을 적용하지 않을 경우 감독원과 협의하여 동일 기준을 일관성 있게 적용한다.

◦ 설계방법

재료특성에 따른 시방서에 규정된 설계방법의 적용을 원칙으로 하되, 필요시 감독원과 협의 후 다른 설계방법을 적용할 수 있다.

◦ 사용재료와 설계기준강도

- 구조재료는 K.S 규정에 적합하고, 염해에 대하여 안정적인 재료를 사용하며, 구조적 안전성 확보와 경제적인 설계가 되도록 한다.

(3) 설계하중

◦ 각종 설계하중의 적용 및 하중조합은 구조설계 적용기준에 따른다.

◦ 고정하중은 건축설계 도면의 마감표에 근거한 정확한 하중을 산정하여 적용한다.

◦ 지진하중의 지반계수(S)는 지반조사결과에 근거하여, 토목구조기술사와 “기초설계”를 담당하는 토질 및 기초기술사가 협의 후 결정한다.

◦ 설계수위의 적용은 지반조사 결과을 따르고, 단지의 고저차 등을 고려하여 조정할 수 있다. 조정 시는 근거자료를 계산서에 명시하고 구조설계도면에 설계적용 수위를 명시한다.

(4) 부재설계

◦ 건축물의 기초종류(지내력기초, 말뚝기초 등)는 지반여건에 적합하게 하며, 기초지반 및 지정부분의 허용지지력은 “기초설계”를 담당하는 토질 및 기초기술사의 판단에 따른다.

4. 설계기준 작성 및 기타

◦ 과업내용서에 명시된 설계기준과 조건 이외에 본 과업수행에 필요한 각종 설계기준 조건을 작성하여 상세 설계시에 적용한다.

(선형, 폭원, 재료의 종류 및 강도, 구조물별 설계방법 등)

◦ 상기 기본구상은 우리公社 설계회의를 거쳐 확정한다.

Ⅳ.  상 세 설 계

1. 설계조건 및 일반사항

(1) 설계조건

◦ 보도육교 1개소

(2) 일반사항

◦ 기본구상에서 결정된 최적안과 설계기준에 의거 상세설계를 시행한다.

◦ 공인된 구조계산용 프로그램을 사용한다.

2. 디자인 설계

◦ 보도육교 디자인은 1,2단지 보도육교 디자인을 기본으로 하되, 인천경제자유구역청 경관자문의 의견을 반영하여 실시한다.

◦ 1,2단지 보도육교 디자인 적용시 3,4단지 현황에 부합하도록 설계한다.

◦ 육교 구조물은 시민의 정서에 부합되고, 주변환경과 조화를 이룰 수 있는 환경친화적인 구조물이 되어야 한다.

◦ 구조물의 특징을 최대한 살려 개성적인 분위기를 창출하고, 아름다움을 연출하도록 구상한다.

◦ 시설의 구조적 안전과 관리, 주간경관 등에 저해요소가 되지 않도록 해야한다.

◦ 야간 및 주관 경관효과 극대화를 위한 조형물 설치가 가능하며, 원거리에서도 인지 가능하도록 연출해야 한다.

◦ 부대시설은 교량구조물 및 주변환경과의 조화를 고려하여 계획하여야 한다.

◦ 전기시설, 경관조명, 사인물 등을 포함하여 계획하여야 한다.

◦ 경관 조명시 인근 아파트 주민 및 보행자, 자동차 운전자에게 눈부심을 주지 않도록 하여야 한다.

◦ 시공 및 유지관리의 용이성, 경제성 등을 감안하여 가장 적합한 전기공급방법 및 제어방식(시간대별, 계절별 등)이 결정되어야 한다.

◦ 경관조명의 규모, 배치, 평면, 입면 등 창작사항과 광원의 종류, 조명기구의 구성, 조명의 연출, 설치 방법 등이 제시되어야 한다.

3. 토공 설계

◦ 연약지반에 대한 조사, 시험결과를 면밀히 분석, 설계에 적용하여야 한다.

4. 구조물 설계

(1) 육교설계

◦ 시공방법에 따라 구조물에 발생하는 응력 변화가 많은 구조물은 설계시 시공방법을 발주자와 협의하여 이에 따른 결과를 응력계산, 도면작성, 보고서등에 반영하여야 한다.

◦ 육교형식 및 가설공법에 따른 주요 가시설물을 설계에 반영한다.

◦ 설계에 따른 시공방법 또는 순서를 도면과 보고서에 반영하여야 한다.

◦ 보도육교 하부공간인 도로를 점용하지 않도록 도로 위에 기둥을 설치하지 않아야 한다.(단지 내에 기둥설치 가능)

◦ 하부공간은 도로관리 등에 필요한 공간이 확보되도록 설계한다.

◦ 내진설계를 적용하도록 하며, 특히 낙교방지 시설을 설계하도록 한다.

◦ 기존 구조체와의 연결 부위는 구조적 안전성 및 시공성을 확보한 보강 설계안을 제시한다.

◦ 공사 중 계측기기 설치를 검토한다.

◦ 다음과 같은 유지관리시설을 설계하고 유지관리 지침을 작성한다.

- 점검통로 및 조명시설

- 교좌장치부의 점검, 교체방법 등

- 공사완료 후 계측시스템 검토

- 기 타

(2) 부대시설

◦ 표지판은 이용자의 편의 및 안전을 고려하여 설계하여야 하며 표지판의 재질은 내구성과 경제성을 비교 검토하여 설계한다.

◦ 난간, 교명주 등은 발주자와 협의하여 설계한다.

Ⅴ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

◦ 모든 성과품의 인쇄는 발주자와 상의하여 승인을 득한 후 실시한다.

2. 작  성

(1) 보고서

◦ 보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

◦ 발주자의 지시사항, 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

(2) 구조계산서

◦ 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다.  특히, 프로그램의 입. 출력 자료는 모든 CASE별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

◦ 구조계산서는 작업순서에 따라 모든 계산근거를 명기한다. 다만, 구조해석 결과물은 부재설계에 필요한 부분만 요약하여 수록한다.

◦ 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

◦ 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다.

출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주자와 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

◦ 구조계산서는 책임기술자의 확인 후 서명 또는 날인하여야 한다.

◦ 구조계산시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

(3) 설계도면

◦ 국토해양부 고시 “설계도서작성기준”에 의해 작성한다.

◦ 내실 있는 시공과 정확한 품질관리를 위해서 시공자(기술자 및 기능공) 및 감독자가 알기 쉽게 작성하고 복잡하고 중요한  도면은 보조도면(상세도)을 의무적으로 작성 제출한다.

◦ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주자와 협의하여 결정한다.

◦ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

◦ 설계도면에는 주석(NOTE)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및  강도, 주요설계 조건, 시공시 유의사상 및 특기사항을 수록한다.

◦ 설계도면에는 관련 도면난을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

◦ 모든 도면은 CAD 프로그램을 이용 작성하고 그 결과를 CD로 제출한다.

◦ 구조설계도면

- 구조도면 작성자는 도면작성 전과 도면작성 완료 후, 건축도면과의 평면, 단면 등 일치여부를 확인하여야 한다.

- 구조도면은 매장 구조기술사가 검토, 날인(서명)하고, 해당 구조계산 참여기술자와 도면작성자를 기록하여야 한다.

(4) 유지관리 지침

◦ 유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

① 개  요

․ 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

② 구조계획도

․ 구조일반도, 주요단면도

③ 구조특성

․ 구조의 역학적 특성, 주요 구조부재의 특성

④ 유지관리시설

․ 시설의 종류, 목적, 사용방법

⑤ 점  검

․ 주요 점검항목, 점검방법

⑥ 보수방법

․ 교좌장치, 신축이음장치, 도장, 용접부위, 하부구조 등

(5) 시방서

◦ 공사 시방서에는 토목전문시방서에 준용하여 상세하게 기술하여야 한다.

- 계약에 관한 사항 또는 계약조건들에 대한 상세사항

- 공사에 필요한 각종 기술사항 및 관리사항 등을 포함한다.

- 과업에 따른 설계자의 공사지침, 방법 등에 대한 규정등에 대하여 작성한다.

◦ 주요설계 계수가 가정값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 공사 시방서에 이러한 사실을 명시해야 한다.

◦ 관련시방 또는 지침에 규정된 사항의 변경 또는 주요자재 (강판, 강관, 철근 등) 허용공차의 변경이 필요할시 이를 공사 시방서에 기재한다.

(6) 설계예산서

◦ 설계 예산서는 설계 설명서, 설계 내역서, 단가 산출서로 구별하되 단가 산출서는 별책으로 작성한다.

◦ 수량 및 단가산출서

- 수량산출은 국토해양부 제정 적산요령을 기준으로 하되, 산출기초는 세부내역을 쉽게 알기 쉽도록 공종별로 구분하여 작성한다.

- 적용단가는 조달청 발행 가격정보지를 기준으로 하고, 전문조사기관이 발행한 자료 및 3개 이상의 제조 판매업체의 견적가를 기준으로 하여 비교 적용한다.

- 복합단가로 구성되는 품목은 반드시 품명, 규격, 수량, 단가, 기타 특징을 명기하여 단위 일위대가표로 작성하되 건설표준품셈을 기준으로 작성한다.(품셈은 당해연도 표준품셈을 준한다)

(7) 기  타

◦ 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

3 납  품

∙ 계약자는 실시설계 종료일로부터 5일 이내에 다음 성과품 및 수량을 납품하여야 한다.

∙ 성과품의 종류 및 소요부수

납 품 목 록		수 량	비 고
․종 합 보 고 서		10부
․공 사 시 방 서		10부
․구 조 계 산 서		10부
․설 계 예 산 서		10부
․수 량 산 출 서		10부
․단 가 산 출 서		10부
․설계도면	설 계 원 도 A1	1부
	축 소 판 원 도 A3	1부
	청 사 진 도 면 A1	2부
	축 소 도 면 A3	10부
․CD-ROM		1조
․기타 발주자가요구하는 자료		1식
․조 감 도		1부